문서번호	공원녹지과-21935
결재일자	2023. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		공원팀장		공원녹지과장		도시관리국장
장현규		박종갑		석승우		전결 12/14
						임창섭
협조

미소어린이꿈공원 조성사업 준공 보고

미소어린이꿈공원 조성사업 준공보고

2023. 12.

[공원녹지과]

미소어린이꿈공원 조성사업 준공 보고

「미소어린이꿈공원 조성사업」추진 관련 공사준공계가 접수되어 아래와 같이 검토하고 준공하고자 함

□ 공사개요

ㅇ 대 상 지: 미소어린이공원(하왕십리동 1055 일대)

ㅇ 공사기간: 2023. 9. 14. ~ 12. 13.

ㅇ 공사내용

- 수목식재: 스트로브잣나무, 사철나무 및 회양목 등 7종 4,070주 및 잔디 174㎡ 식재

- 시설공: 물놀이시설 6개소, 모험놀이시설 5개소 등 33종 35점

- 포장공: 블럭 669.5㎡ 및 고무칩 885㎡ 총 1,554.5㎡ 포장 및 경계석 304.1m 설치

ㅇ 공 사 비: 금936,735,500원 (도급비 472,000,000원 / 관급자재 464,735,500원)

ㅇ 공사업체: (주)하늘티앤씨 대표 양희선

□ 추진경위

ㅇ	2023. 2. 23. ~ 8. 31.	실시설계용역 시행 및 완료
ㅇ	2023. 7. 17. ~ 7. 27.	어린이참여위원회(아동청년과) 의견 수렴
ㅇ	2023. 8. 21. ~ 9. 11.	공사발주, 낙찰자 선정 및 계약
ㅇ	2023. 9. 14. ~ 12. 13.	공사시행 및 완료

▢ 사전 합동점검 결과

ㅇ 일    시: 2023. 12. 13.(수) 09:00

ㅇ 점 검 자: 3명(공원팀장, 담당자, 현장대리인)

ㅇ 점검내용: 공사 전반사항 점검 등

ㅇ 점검결과: 특이사항 없음

▢ 전·후 사진

	⇒		⇒
미소어린이꿈공원 (전)		미소어린이꿈공원 (중)		미소어린이꿈공원 (후)

□ 검토의견

ㅇ 「미소어린이꿈공원 조성사업」 현장 확인 및 제출 서류 검토 결과 설계도서 등에 따라 적합하게 시공되었으므로 준공 처리하고자 함

붙임  1. 공사대장 1부.

2. 준공내역서 1부.

3. 사업완료 보고서(사진포함) 1부.

4. 계약금액 검증확인서 1부.

5. 산업안전보건관리비 검토결과서 및 준공도면 1부.  끝.