문서번호	도로보수과-14218
결재일자	2023. 12. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
전휘기		유은중	12/15
			代박진기
협조	주무관		맹우재
	주무관		김철홍

『2023년 노후포장도로정비 노면표시설치공사(1구역)』

설계변경(제1회, 정산) 검토 보고

2023. 12.

서부도로사업소

(도로보수과)

『2023년 노후포장도로정비 노면표시설치공사(1구역)』

설계변경(제1회, 정산) 검토 보고

우리사업소에서 시행 중인 2023년 노후포장도로정비 노면표시설치공사(1구역)와 관련, 고강성 콘크리트 포장, 추가노선 정비 및 통일로 중앙버스전용차로 설치 등에 대하여 설계변경(제1회, 정산)을 실시하고자 함.

□ 추진근거

○ 노선변경 및 추가노선 포장단면 결정 보고

- 도로보수과-5064(‘23.05.16.)호

○ 2023년 중앙버스전용차로 고강성 콘크리트 포장공사 발주계획

- 도로보수과-6143(‘23.06.15.)호

○ 한남대로 노후 포장도로 정비 추진 계획

- 도로보수과-6952(‘23.07.05.)호

○ 2023년 노후포장도로 정비공사(1구역) 하반기 추가 노선 정비계획 검토 보고

- 도로보수과-10333(‘23.09.14.)호

○ 통일로 중앙버스전용차로 설치 사업(1단계)에 따른 도로포장 및 버스정류장 신설 추진 계획

- 도로보수과-10774(‘23.09.25.)호

○ 중앙버스전용차로 고강성 콘크리트 포장공사 예산 집행게획 검토보고

- 도로보수과-12902(‘23.11.17.)호

○ 2023년 노후포장도로 노면표시설치공사(1구역) 설계변경의 건

- 서검(감리) 2312-001(’23.12.04.)호

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2023년 노후포장도로정비 노면표시설치공사(1구역)-서부

○ 공사기간 : 2023.04.03. ~ 12.31.

○ 시 공 사 : ㈜월드플러스씨앤씨 대표 신현각

○ 총공사비 : ***********

- **************************************

○ 주요공종 및 물량

- 노면표시(융착식) 11,318m/노면표시(상온경화형) 29,027m

- 차로밑그림 39,241m/교통통제 및 안전처리 123일

□ 설계변경 시행

① 도급비[2023년 노후포장도로정비 노면표시설치공사(1구역)]

○ 설계변경 사유

- 상·하반기 노선변경 및 추가노선 정비(한남대로, 녹사평대로 등)결정에 따른 도색 물량 증·감

- 중앙버스전용차로 고강성 콘크리트 포장에 따른 도색 물량 증·감

- 통일로 중앙버스전용차로 설치 사업(1단계)에 따른 도색 물량 증·감

- 교통통제 및 안전처리(사인보드카, 특별인부)에 대하여 실 투입된 물량 정산

- 제경비율 정산 : 보험료, 산업안전보건관리비, 퇴직공제부금비, 환경보전비 등 정산

○ 변경물량

***	**	**	**			**
			**	**	********
**** *********	********	*	******	******	********
**** ***********	********	*	******	******	********
*****	********	*	******	*******	********
*********** *******	******	*	**	***	*****
*********** *******	******	*	**	**	*****
*********** ******	******	*	**	***	*****
*********** ******	******	*	**	**	*****

② 관급비(노면표지용 페인트, 도로표지병, 자착식표지 등)

○ 설계변경 사유

- 상·하반기 추가 노후포장도로 정비(한남대로, 녹사평대로 포장 포장 등), 중앙버스전용차로 고강성 콘크리트 포장, 통일로 중앙버스전용차로 설치사업에 따른 도색 물량 증·감으로노면표지용 페인트(4종) 물량 증가

- 노후포장도로 정비시 망실된 자착식표지 및 도로표지병 복구를 위해 구매한 관급자재(현장설치도)에 대하여 현장 실측에 따른 규격 및 수량 변경

○ 변경내역

**	***			***			***
	*****	*****	*****	*****	*****	*****	**
****************************	***	******	**********	*****	******	**********	*******
****************************	**	******	*******	**	******	*********	****
*****************************	***	*******	**********	***	*******	**********	****
*********************************	*	*	*	**	*******	*********	****
************	*	*	*******	*	*	*******	*
****	*	*	**********	*	*	***********

③ 설계변경 금액

(단위 : 원)

*****	***	***	***	***
****	***********	***********	*************
*****	***********	***********	*************
*****	**********	***********	*************
*****	*********	*********	*

』※ 증액분 세부내역

설계변경 증액 내용	금액(원)	비 고
한남대로 노후 포장도로 정비 추가 재배정 예산	246,284,000
통일로 중앙버스전용차로 신설사업 추가 재배정 예산	198,286,000
합계	444,570,000

○ 증액분(금 444,570천원)에 대하여 노후포장도로정비 노면표시설치공사 추가 재배정 예산(한남대로 포장) 및 통일로 중앙버스전용차로 신설사업 추가 재배정 예산을 사용하여 설계 변경을 실시하고자함.

- 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물 관리, 노면표시 유지관리 사업, 시설비 및 부대비, 시설비(증액분 금 246,284천원)

- 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통체계 및 도로소통개선, 통일로 중앙버스전용차로 조성, 시설비 및 부대비, 시설비(증액분 금 198,286천원)

□ 조치계획

○ 상기 보고내용을 반영하여 변경내역서와 같이 설계변경을 시행하고자 함

붙임 1. 계변경내역서 1부.

2. 검증확인서 1부.  끝.