문서번호	시설관리과-4536
결재일자	2023. 12. 15.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
임무환		라철흠	12/15
			代김창신
협조

설계변경 자문위원회 심의결과 보고

[한강공원 자전거도로 업그레이드 공사 1구역]

2023. 12.

미래한강본부

(시 설 부)

설계변경 자문위원회 심의결과 보고

『한강공원 자전거도로 업그레이드 공사(1구역)』에 대한 설계변경 자문위원회 심의 결과에 대한 보고임

□ 자문위원회 개요

○ 건     명 : 『한강공원 자전거도로 업그레이드 공사(1구역)』

○ 자문 일시 : 2023. 12. 12. ~ 2023. 12. 15.

○ 자문위원 구성 : 내부위원 2인, 외부위원 2인

○ 주요심의 사항 : 설계변경 목적 및 원가 산출근거의 적정성

- 설계변경 금액

(단위:원)

항 목	당 초	변 경	증 감
***	***************	****************	*************

- 설계변경사유

· 24년 대상지(난지,광나루,잠실) 추가시공 및 거리표지목 설치에 따른

공사 물량증가.

· 현장여건 변경에 따른 신규공종 및 공종별 공사물량 증,감 사항 반영.

□ 심 의 결 과

*********************************

□ 행정 사항

○ 심의결과 검토의견사항을 설계에 반영 후 설계변경 시행.

***********************