문서번호	토목과-17139
결재일자	2023. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		도로조명팀장		토목과장		안전건설교통국장
이석정		김종천		성규상		12/15
						신용철
협조
	재무과장		나재진
	예산팀장		박영수

실정보고 및 설계변경 검토 보고[응봉교 경관조명 설치공사]

- 응봉교 경관조명 설치공사 - 실정보고 및 설계변경 검토 보고

2023. 12.

(토목과)

- 응봉교 경관조명 설치공사 -

실정보고 및 설계변경 검토 보고

「응봉교 경관조명 설치공사」관련 시공사로부터 공사현장 실정보고가 접수되어 이에 대해 검토하고 조치계획을 보고 드림.

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 응봉교 경관조명 설치공사

ㅇ 공사내용: LED경관조명 설치 및 전기 배관·배선 공사

******************

*************************

**************************************************************

□ 실정보고 내용 및 검토의견

▶관련근거: 실정보고 제출[**********************]

ㅇ 안전 및 공사 품질 확보를 위한 난간조명 전선배관(덕트) 추가 시공

- 노출전선으로 인한 안전사고 예방과 미관저해 방지 등 품질 개선을 위해 케이블 덕트(AL DUCT 30*25mm) 시공 필요

ㅇ 교통 민원 최소화 등 안전 관리를 위해 신호수 추가 배치 및 현장 실정에 적합한 크레인으로 규격 변경 및 물량 증가

- 크레인 규격(트럭탑재형 5톤→스카이 3.5톤)을 변경하고 차량 통행 및 교통정리 등 안전 확보를 위해 신호수 추가 배치 필요

ㅇ 기타 현장 여건에 따른 신규공종 및 물량 증·감 반영 등

□ 설계변경 내용

ㅇ 주요 물량 조정내역

구 분	공 종	규 격	단위	수량		증·감		비고
				당초	변경
****	*******	******	*	***	*	**	***	*** ****
	*******	******	*	*	***	**	***
****	***********	*******	*	*	***	**	***
****	*******	******	*	***	*	**	***	*** ****
	*******	******	*	*	***	**	***
	******	******	**	*	*	**	*
	********	******	*	*	**	**	**
	***	*	*	*	**	**	**

ㅇ 계약금액 조정내역

(단위: 천원)

구 분	변경금액		증·감		비 고
	당 초	변 경
*****	*******	*******	**	******

***************************

□ 조치계획

ㅇ 실정보고 사항에 대해 검토 결과 타당하다고 사료되어 승인코자하며, 공사비 증액분은 낙찰차액을 활용하여 향후 설계변경에 반영코자 함.

ㅇ 준공기한 연기

- 동절기 도래로 기상악화에 따른 작업지연 및 추가 공정 발생, 경관조명 설치 후 시운전 진행 등 내실 있는 공사 추진을 위한 절대공기 부족

□ 행정사항

ㅇ 낙찰차액 활용: 기획예산과

ㅇ 설계변경 협조: 재무과

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.

3. 계약심사결과 1부.

4. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

5. 실정보고서 1부.  끝.