문서번호	도시철도토목부-15355
결재일자	2023. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
장대성		박형복	12/14
			윤병헌
협 조
	주무관			김봉성

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

계약금액 조정 검토보고(총차6회, 6차1회)

2023. 12

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

계약금액 조정 검토보고(총차6회, 6차1회)

건설사업관리단으로부터 제출된 물가변동 및 설계변경 등에 따른 계약금액 조정(총차6회, 6차1회) 요청에 대한 검토보고 임.

※ 관련서류 : 동기공 제2023–7983호(’23.12.14) “설계변경 계약요청(총차6회, 6차1회)”

□ 관련근거

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약 법률 제22조(물가 변동 등에 따른 계약금액의 조정)

ㅇ 공사계약 일반조건 제7절 계약금액의 조정

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사

ㅇ 위    치 : 경기도 남양주시 오남읍 양지리 ~ 진접읍 금곡리 일원

ㅇ 공사금액 : ***************************

ㅇ 공사기간 : ’18.12.31.∼ ’26.02.28. (6차공사 ’23.4.1.∼’23.12.31.)

ㅇ 규    모 : 인입선(L=5,556m), 차량기지(113m)

ㅇ 건설사업관리단 : ㈜동명기술공단건축사사무소 외 4개사

ㅇ 도 급 자 : ㈜KCC건설

ㅇ 계약현황

(단위 : 백만원)

구 분	전 체	계 약 현 황			비고
		기시행 (1차~5차)	6차 (진행중)	잔 여
계약금액	*******	******	******	******
계약기간	********** *********	********** *********	********** *********	-

□ 추진경위

ㅇ ’23.03.28 : 6차공사 계약

ㅇ ’23.04.01 : 6차공사 착공

ㅇ ’23.09.08 : 물가변동 조달청 검토완료**********************

ㅇ ’23.12.05 : 설계변경 자문위원회 개최(소위원회)

□ 건설사업관리단 보고내용

【총차6회】

ㅇ 변경사유

- 물가변동(7회)으로 인한 계약금액 조정

- 암판정 결과 반영 등 실정보고 승인사항 반영

ㅇ 공사비 증·감 현황

(단위 : 천원)

공 종	공 사 비				비고
	당 초	변 경	증 · 감
1. 터 널	**********	**********	***	*******
2. 개착환기구	*********	*********	***	*****
3. 수직구가시설	*******	*******		*
4. 가 설 공	*********	*********		*
5. 부 대 공	*********	*********		*
6. 차량기지	*********	*********		*
7. 미확정설계공종(P.S)	********	********	***	*******
8. 제경비(보험료 外)	**********	**********	***	*******
9. 물가변동비(1회~7회)	**********	**********	***	*********
도 급 액	***********	***********	***	*********
관급자재비	*********	*********	**	*******
총 공 사 비	***********	***********	***	*********

ㅇ 주요 변경내용

(단위 : 천원)

구분	변 경 내 용		공 사 비				비고
			당 초	변 경	증 · 감
총차6회	****************				***	*********
		***************************	*******	*******	***	*******
		**********************	*	******	***	******
		******************************	*	*******	***	*******
		***************************	*********	*********	***	*******
		***********************	**********	**********	***	*******
		**********************	*	******	***	******
		**************************	******	*******	***	******
		******************************	******	*******	***	******
		************************	*	******	***	******
		**********************	******	******	***	*****
		*********************	*	******	***	******
		**********************	*	******	***	******
		****************	*******	*******	***	******
		********************************	*******	*******	***	*******
		*******************	*	*******	***	*******
		***********************	******	******	***	******
		************************	*******	*******	***	******
		*********************	*********	*********	***	******
		**********************************	*******	*******	***	*******
	****************				***	*********
		*****************************	*	*********	**	*********	********
		******************************	*	******	***	*****
계			*********	**********	***	*********

【6차 1회】

ㅇ 변경사유

- 총차6회 변경에 따른 6차공사 해당분 반영

- 물가변동으로 인한 계약금액 반영(ESC 1~7회)

- 효율적인 공정관리를 위한 공사구간 조정사항 반영

ㅇ 공사비 증·감 현황

(단위 : 천원)

공 종	공 사 비				비고
	당 초	변 경	증 · 감
1. 터 널	*********	*********	***	******
2. 개착환기구	*	*		*
3. 수직구가시설	*	*		*
4. 가 설 공	*******	*******	**	*******
5. 부 대 공	*******	*******	**	******
6. 차량기지	******	******	***	******
7. 미확정설계공종(P.S)	******	*******	***	*******
8. 제경비(보험료 外)	*********	*********	**	*******
9. 물가변동비(1회~7회)	*********	*********	***	*******
도 급 액	**********	**********		*
관급자재비	*********	*********	***	*******
총 공 사 비	**********	**********	***	*******

ㅇ 주요 변경내용

(단위 : 천원)

구분	변 경 내 용		공 사 비				비고
			당 초	변 경	증 · 감
6차1회	▸공사구간 조정				***	******
		∘ 터널굴착(단·복선, 512m → 512m)	*********	*********	**	******	패턴변경
		∘ 라이닝 콘크리트(단·복선, 2,226m → 2,237m)	*********	*********	**	******
		∘ 부대공(부속터널 등)	*********	*********	**	***
	▸물가변동 및 기타				***	******
		∘ 물가변동으로 인한 계약금액 조정(1회~7회)	*********	*********	**	*******	k7=4.07% 신규반영
		∘ 제경비(4대 보험료 등)	*********	*********	***	*******
계			**********	**********		*

【공사예정공정표 변경】

ㅇ 변경사유

- 총차6회 설계변경에 따른 변경금액 반영************************

- 공정 효율성 향상을 위한 시공순서 변경 반영

ㅇ 구간별 주요 변경 현황

구 분	사 유	당초기간	변경기간	CP대상	비고
환기구#1 /수직구	********************** ****************** ************* *************** **********	***********	************	**
경사갱 부속터널 (송풍기실 외)	*********************** **************	***********	***********	***
복선터널 (2,3구간)	******************************** **************	*************	*************	***

※ CP공종 종료시점 변경 없음(공종종료 : '25.5)

ㅇ 건설사업관리단 검토의견

- 총차6회 설계변경 결과 반영(공사비 증액) 및 효율적인 공정 추진을 위하여 일부 구간 시공순서 변경 등 공사구간 조정을 고려한 공사 총괄 예정공정표에 대한 검토한 결과 적정함.

- 상기 검토내용과 같이 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설 공사와 관련 설계변경(총차6회, 6차1회) 요청 건에 대해 검토한 결과 적정하다고 판단됨.

□ 조치의견

ㅇ 건설사업관리단 검토의견과 같이 총차6회 및 6차1회에 대해 아래와 같이 계약금액을 조정코자 함.

- 계약금액 변경(안)

(단위: 천원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총차6회	계약금액	***********	***********	************
	계약기간	********** *********	********** *********	******
6차1회	계약금액	**********	**********	******
	계약기간	********** *********	********** *********	******

붙 임 : 1) 건설사업관리단 검토의견 1부.

2) 조달청 검토의견서 1부.  끝.