아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	구의아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	공사 변경계약 의뢰 (입상활성탄 교체공사)

우리 정수센터에서 추진하고 있는『’23~24년 입상활성탄 교체공사』에 대하여 다음과같은 사유로 공사 변경계약 의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 공사개요

가. 공 사 명 : ’23~24년 구의아리수정수센터 입상활성탄 교체공사

나. 공사기간 : ’23.11.10.~ ’24.04.30.

다. 계약금액 : ***************************************

라. 계 약 자 : ***************

마. 공사내용 : 입상활성탄 교체 1,980㎥(6개지, 1차수 3, 2차수 3)

○ 변경계약 내용

가. 공사기간

구 분	당 초	변 경	비 고
1차수	’23.11.10~’23.12.31.	-
2차수	’24.01.01~’24.04.30.	’24.01.01~’24.04.30.	변동없음
총차수	’23.11.10~’24.04.30.	’23.11.10~’24.04.30.	변동없음

나. 계약금액

구 분	당 초	변 경	비 고
1차수	*********	*****************
2차수	*********	*********
합 계	*********	*********

다. 연장사유 : 우리센터 입상활성탄 공급지연에 따른 공기연장

라. 지체상금 : 미부과

- 우리센터 귀책사유 해당(발주자 공급 지연)

붙임 : 1. ’23~24년 입상활성탄 교체공사 공사기간 연장 검토보고서 1부.

2. 변경계약 합의서(별첨) 1부.  끝.

	정 수 시 설 과 장
안전관리팀장	이용성		정수시설과장	12/15
함태광
협조자
시행	정수시설과-3750	(	2023. 12. 15.	)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571, 구의아리수정수센터 (구의동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5479	/전송	02-3146-5409	/	hilys@seoul.go.kr	/	부분공개(6)