문서번호	시설보수과-11765
결재일자	2023. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
김영민		12/15
		안준수
협 조
	주무관		정병구

『현저고가차도 외 1개소』

정밀안전진단 및 실태조사 용역 실정보고(2차)

2023. 12.

서부도로사업소

시설보수과

『현저고가차도 외 1개소』

정밀안전진단 및 실태조사 용역 실정보고(2차)

우리 사업소에서 시행하는「현저고가차도 외 1개소 정밀안전진단 및 실태조사 용역」과 관련하여 실정보고(2차) 사항이 있어 검토 보고를 드림

□ 추진근거

○ GPR탐사 실정보고(현저고가차도 외 1개소 정밀안전진단 및 실태조사 용역)

【대한산업안전협회 23-토목시설안전2국-0094호(2023.12.14.)】

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 현저고가차도 외 1개소 정밀안전진단 및 실태조사 용역

○ 용역기간 : *************************

○ 대상시설 현황

시설물명	위 치	연장 (m)	폭 (m)	설계하중	준공년도	종별	등급
현저고가차도	************	***	**	*****	****	**	*
한남2고가	***************	***	**	*****	****	**	*

○ 도 급 비 : ************

○ 업 체 명 : ***********************************

□ 보고내용

○ 실정보고 사유

- 현재 과업대상 시설물 중 현저고가차도에 대하여 보다 면밀한 조사를 수행하고자 전회차 시험과는 다르게 경간이 가장 길고 정모멘트가 크게 발생하는 S5구간에서 재하시험을 변경 실시하고자 함

- S5구간 하부에는 독립문역 사거리가 위치하고 있어 교차로내 교통섬 설치 및 교통통제와 중앙부와 단부에 각각 계측장비를 2대(1대 추가)를 운용해야 하는 실정으로,

- 교통섬 설치 및 교통통제와 재하시험은 전문 외부 용역이 필요한 사항으로 추가 비용을 아래와 같이 설계내역에 반영하고자 함

구 분	수량	단위	금액	비고
교통섬 설치 및 교통통제	1	식	**********
계측장비	1	대	********
고급기술자	2	인	********
합계			**********

- 금회(2023년) 재하시험 위치

금회 재하시험 시험경간 선정

○ 용역비 증·감 금액***********

(단위 : 원)

구 분	용 역 비		증 ․ 감	비고
	당 초	변 경
*****	***********	***********	*********	*************

- 예산과목 : **********************************************************************

****************

□ 향후계획

○ 상기 보고내용을 반영하여 우선 시행하고, 추후 정산 및 설계변경을 시행하고자 함.

붙임 : 재하시험 실정보고(대한산업안전협회) 1부.  끝.