아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시미래한강본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 계약의뢰(올림픽대교북단 외 1개소 승강기 설치공사)

우리본부에서 추진중인 『올림픽대교북단외 1개소 승강기 설치공사』 관련 다음과 같이 설계변경 시행 및 계약의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가.건    명: 올림픽대교북단외 1개소 승강기 설치공사

나.공사기간:  2023. 3. 28. ~ 2023. 12. 31.

다.도급금액: 금1,568,607,900원

라.업 체 명: 정상개발 주식회사

마.변경내역

○ 기간변경 :

구 분	당 초	변 경	비 고
기간	2023. 3.28. ~ 2023.12.31.	2023. 3.28. ~ 2024. 3.20.	증80일

○ 계약금액 :

구 분	당 초 (원)	변 경 (원)	증·감 (원)	비 고
도급액	1,568,607,900	1,628,979,000	증60,371,100

바.변경사유: 현장여건에 따른 공사비 변경 및 우천으로 인한 기한연장 반영

사.예산조치

-올림픽대교북단외 1개소 승강기 설치공사의 도급증액(60,371천원)은 예산잔액을          활용하여 설계변경 조치.

-예산과목: 한강 접근체계개선(일반회계),한강공원 승강기 신설 및 개선,시설비

붙임  1. 방침서 (올림픽1회) 1부.

2. 변경내역서(올림픽) (대용량 첨부).

3. 합의각서 (올림픽) (대용량 첨부).

4. 준공기한연기의뢰서 (대용량 첨부).

	기 반 시 설 과 장
주무관	이균휴		기반시설과장	이석근		시설부장	12/15
代김창신
협조자	주무관	김병수		기획예산과장	이강수		총무과장	박서영
시행	기반시설과-4693	(	2023. 12. 15.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, 한강사업본부 기반시설과	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0676	/전송	02-3780-0744	/	gyunhyu123@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)