아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	용역 재개 및 변경계약 의뢰

우리 부에서 시행중인 '탄천 한강변 정비 및 탄천보행교 신설 사업 소규모환경영향평가 용역' 관련하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경사항 : 용역재개 및 계약기간 변경(용역비 변경 없음)

구 분	계약자	중지 기간	계약 기간
			당 초	변 경	비고
소규모환경영향평가용역	㈜현대이앤씨	**********************	'20.08.04. ~ '21.06.30.	************ **********	기간 연장

나. 변경사유 : 동남권추진단에서 소규모환경영향평가 용역을 '23.12.29.까지 일시정지 하였으나, 현재 실시설계 추진중으로 소규모환경영향평가용역을 재개하고 설계 준공기한('24.06.30.)을 고려하여 준공기한 연기

다. 귀책소재 : **********************

붙임  1. 방침서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	토 목 부 장
주무관	박성준		토목설계과장	박운용		토목부장	12/14
이임섭
협조자	주무관	김종혁
시행	토목부-23877	(	2023. 12. 14.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 청계청사 12층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2155	/전송	02-6438-2199	/	ch83895@seoul.go.kr	/	부분공개(5)