문서번호	치수과-4664
결재일자	2023. 12. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	치수과장
박지수	12/18
	김창신

- 2023년 한강 준설공사 건설사업관리용역 -

설계변경 검토보고(1차1회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

한강사업본부

(시설부)

- 2023년 한강 준설공사 건설사업관리용역 -

설계변경 검토보고(1차1회)

「2023년 한강(저수로, 취수장 주변) 준설공사 감독권한대행 건설사업관리 용역」차수 조정에 따른 설계변경(1차1회) 계획을 보고 드림

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 한강(저수로, 취수장 주변) 준설공사 감독권한대행 건설사업관리용역

ㅇ 과업내용 : 준설공사 전반에 대한 감독권한대행 업무

- 취수장 주변 준설 및 반출 : 23,480㎥

- 저수로 준설 : 27,240㎥, 준설토 반출 : 47,670톤

ㅇ 용역기간 : '23. 9. 4. ~ '24. 5. 31.(1차 '23. 9. 4 ~ '23. 12. 31.)

***************************************

*******************************

□ 추진경위

ㅇ '23.  8.  21. : 준설공사 착수

	<공사계약 현황>
‣ 공사기간 : 2023. 8. 21. ~ 2024. 5. 31.(1차 ‘23. 8. 21 ~ ‘23. 12. 31.) ‣ 총공사비 : 3,018백만원(저수로 1,709백만원, 취수장 1,309백만원) ‣ 시 공 사 : 유호산업개발(주) 대표 유정환

ㅇ '23. 9.  5. : 건설사업관리용역 계약 및 착수

ㅇ '23. 12.  4. : 저수로 준설공사 설계변경 검토서 제출(건설사업관리단→치수과)

ㅇ '23. 12. 14. : 취수장 준설공사 설계변경 검토서 제출(건설사업관리단→치수과)

□ 설계변경 내용

ㅇ 변경사유 : 1차분 건설사업관리기술인 투입계획 변경 및 차량임차료 정산

ㅇ 주요 변경사항

- 총 차 : 변경없음

- 1 차 :

구 분	규 격	단위	당 초	변 경	증 · 감
건설사업관리기술인	상주 및 기술지원	인‧월	21.6	20.34	감) 1.26
차량임차	1식	월	5.09	2	감) 3.09

ㅇ 용역비 증·감 현황

**************************

***********************************                 (단위 : 원)

****		***	***	***
***	*******	***********	***********	****	**********
	*****	************	**********	****	*********
	*	*************	***********	****	**********

□ 조치계획

ㅇ 건설사업관리기술인 및 차량임차료 정산 등 용역 차수 조정에 따른 설계변경(1차1회) 시행

ㅇ 변경계약 의뢰(치수과 → 총무과)

붙임 : 변경 내역서(1차1회) 1부.  끝.