문서번호	치수과-4702
결재일자	2023. 12. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	치수과장	시설부장		미래한강본부장
박지수	김창신	이유국		12/19
				주용태
협 조

- '23년 한강 취수장 주변 준설공사 -

사업계획 변경 검토보고

2023. 12.

미 래 한 강 본 부

( 시 설 부 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

- '23년 한강 취수장 주변 준설공사 -

사업계획 변경 검토보고

자원재활용 및 사업비 절감을 위한 준설토 반출 개선 등에 따른 “2023년 한강 취수장 주변 준설공사” 사업계획 변경 계획을 검토하여 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 한강 취수장 주변 준설공사

ㅇ 위    치 : 한강 잠실수중보 상류(취수장 주변)

ㅇ 공사기간 : '23. 8. 21. ~ '23. 12. 31.

ㅇ 공사규모 : 준설 및 반출 23,480㎥

- 자양 1,300㎥, 일산 500㎥, 풍납 15,580㎥, 성남 5,900㎥, 강북 200㎥

ㅇ 계약금액 : 1,308,527천원(국비)

ㅇ 시 공 사 : 유호산업개발(주) 대표 유정환

ㅇ 감 리 사 : ㈜이준엔지니어링 외 1개사 대표 김정대

□ 추진경위

ㅇ '23.  8. 21. : 공사착수

ㅇ '23. 11. 27. : 안양천교 신설 공사용 토사 11,756㎥ 공급 완료

ㅇ '23. 12.  8. : 암사초록길 현장 준설토 사용 적정성 검토

ㅇ '23. 12. 14. : 암사초록길 현장 조경용 토사 10,000㎥ 공급 업무지시

ㅇ '23. 12. 15. : 변경 예정공정표 제출(건설사업관리단→치수과)

ㅇ '23.    현재 : 준설토 임시야적(공정율 80%)

□ 변경사유

ㅇ 준설토 반출 방안 개선에 따라 공사 준공기한 연장 필요

- 자원재활용 및 사업비 절감을 위해 본부 발주 공사장으로 준설토  반출을 시행중에 있음(안양천교 자전거 도로 신설현장 11,756㎥ 반출)

- 암사초록길 현장 공정계획 검토 결과 '24년 3월 공사용 토사 반입이 가능함에 따라 준설토 반출 시기 조정(예정량 10,000㎥)

⇒ 준설토 반출 시기 및 행정처리 소요기간 등을 감안하여 공사 준공기한 연기 조치

▸ 준공기한 연기 : (당초) '23. 12. 31. → (변경) '24. 5. 31.(증 5개월)

ㅇ 취수장 주변 취수수심 확보를 위해 준설계획 변경 필요

- 성남, 풍납, 강북 취수장 주변 하상 변동에 따른 준설토 퇴적으로 취수수심 추가 확보 필요

⇒ 운반거리 감소에 따른 사업비 절감과 낙찰차액 등을 활용하여 추가 준설(사업비 절감액 : 478백만원, 낙찰차액 : 190백만원)

※ 안양천교 자전거도로 신설 및 암사초록길 조성 별도 사업비 절감액 약452백만원(안양천교 자전거도로 254백만원, 암사초록길 198백만원)

▸ 준설량 : (당초) 23,480㎥ → (변경) 38,990㎥(증 15,510㎥)

ㅇ 암사초록길 조성 현장 준설토 공급에 따른 운반비 추가 확보

- 준설토 반출 계획 변경으로 추가 공사비 81백만원이 필요하나 '23년 국비(한강수계기금) 추가 확보 곤란으로 시재정 투입이 불가피

⇒ 준설토 반출 계획 변경에 따른 부족 예산은 '24년 시비 사용

□ 조치계획

ㅇ 절대공기 확보를 위한 시설공사 준공기한 연기 조치

- (당초) '23.8.17~'23.12.31 → (변경) '23.8.17 ~ '24.5.31

ㅇ 사업계획 변경에 따른 공사 계약금액 변경 시행

- 공사비 변경 내역                                  (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감		비 고
도급비	1,308,527,000	1,578,602,000	증)	270,075,000
공급가액	1,189,570,000	1,435,092,728	증)	245,522,728
부가가치세	118,957,000	143,509,272	증)	24,552,272

ㅇ 예산 부족으로 사업 추진에 차질이 없도록 시비('24년 예산) 사용

- 사업비 변경 내역                                  (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
계	1,498,382	1,578,602	증) 80,220
국비	1,498,382	1,498,382	-
시비	-	80,220	증) 80,220

- 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강 하천시설 관리, 한강 저수로 정비, 시설비 및 부대비, 시설비(24년 예산)

□ 향후계획

ㅇ '23. 12. : 준공기한 연기 의뢰(치수과 → 총무과)

ㅇ '24.  3. : 준설토 반출(암사초록길 현장)

ㅇ '24.  5. : 공사 준공

붙임 : 1. 설계 변경 내역서 1부.

2. 사업비 절감 내역(한강 취수장 주변 준설공사) 1부.  끝.