아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 (2차) 및 부기금액 변경 시행에 따른 계약의뢰(2023년 고덕1동외 10개동)

우리사업소에서 시행하고 있는 『2023년 고덕1동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여 본부 설계변경 심사를 마치고 아래와 같이 설계변경(2차) 및 차수별 부기금액 변경 시행하고 아래와 같이 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 2023년 고덕1동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 도 급 자: 욱삼건설(주)  대표 백종은

다. 계약기간: 2023.4.28. ~ 2023.12.29.

라. 설계변경 내용: 신공종 발생 및 계약물량 증․감

마. 설계변경 내역                                                     (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총 부기금액	675,334,120	738,276,000	증 62,941,880
1차 부기금액	350,000,000	738,276,000	증 388,276,000
2차 부기금액	325,334,120	-	감 325,334,120

바. 설계변경 사유: 계약물량 증,감 및 신공종 발생 등으로 변경

사. 예산과목: 상수도사업비용,영업비용,급.배수공사비,신설공사비

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(교체장애수전,불용관)

상수도사업비용,영업비용,배급수비,지원사업성시설비(수도계량기보온재)                    자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비

붙임  1. 설계변경 계약심사 결과(본부 안전조사과) 1부.

2. 설계변경 내역서(2차) 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

	시 설 관 리 과 장
안전관리팀장	강희창		시설관리과장	12/19
성기옥
협조자
시행	시설관리과-20196	(	2023. 12. 19.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, (성내동)541-4	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5193	/전송	02-3146-5239	/	jin2ju@seoul.go.kr	/	부분공개(5)