문서번호	기전과-14206
결재일자	2023. 12. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
박준규	12/20
	김병용

(코리아빌딩 증축공사)

교통안전시설물(신호)원인자공사

실정보고사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12. 20. (수)

강서도로사업소

(기전과)

코리아빌딩 증축공사

교통안전시설물 원인자공사 승인 검토보고

사업소장 : 이경우☎2657-7910 기전과장 : 김병용☎7908 담당 : 박준규☎7963

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사의 승인요청을 검토하고 결과를 보고드림

Ⅰ		관련근거

□ 교통안전시설물 원인자부담공사 실정보고 요청

ㅇ (주)리더스스타코리아********3-0025호(2023.12.13.)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 코리아빌딩 교통안전시설물 설치공사

□ 원 인 자 : (주)리더스스타코리아

□ 공사위치 : 구로구 신도림동 413-9

□ 공사내용 : 교통신호기 설치

□ 공사업체

구분	설 계	감 리	시 공	비 고
**	********	********	********

Ⅲ		실정보고 사항

□ 도급비 : 103,060천원 → 70,950천원(감32,110천원)

ㅇ 신도림주민센터 : 직접비 감 20,175천원

- 경보등 부착대길이 변경

- 지하 지장물로 인한 지중 관로 굴착 불가 등

ㅇ 간접비(간접노무비 및 보험료 등) : 직접비 감 11,935천원

□ 상세내용 및 내역 붙임 실정보고 참조

Ⅳ		검토내용

연번	구분	검 토 사 항	검토결과
1	일 반	규제 심의내용과 설계도서 내용 대조	적 정
2	일 반	설계, 시공, 감리업체 확인	적 정
3	설계사	(신호)전기설비의 설계업 등록업체 교통전문분야(교통기술사 보유)로 신고한 자	적 정
4	시공사	(신호)전기공사업	적 정

Ⅴ		조치의견

□ 제반서류가 적정하여 조건부승인하고자 함

Ⅵ		행정사항

□ 원인자 및 유관기관 승인 통보

붙임  공사 실정보고 제출보고서 1부.  끝.