문서번호	설비부-20979
결재일자	2023. 12. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
김세익		곽용길	12/20
			신용휴
협 조

「로봇과학관 건립 기계설비공사」

설계변경 소위원회 조치결과에 대한 검토보고

2023. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「로봇과학관 건립 기계설비공사」

설계변경 소위원회 조치결과에 대한 검토보고

『로봇과학관 건립 기계설비공사 』관련 건설사업관리단으로부터 제출된 소위원회 심의 조치결과가 접수되어 검토하고 보고 드림.

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 로봇과학관 건립 기계설비공사

ㅇ 위    치 : 서울특별시 도봉구 창동 1-25

ㅇ 규    모 : 지하2층/지상4층, 연면적 7,308㎡

ㅇ 계약현황

****	***	**	****	*******
******	*************	**	***********************	*************
		**	***********************	*************

ㅇ 건설사업관리단 : (주)종합건축사사무소 근정 외 1개사

□ 관련근거

ㅇ 설계변경 소위원회 개최 [설비부-20353, 2023.12.13.]

ㅇ 설계변경 소위원회 자문결과에 대한 검토보고

ㅇ 로봇과학관 건립 기계설비공사 설계변경 소위원회 지적사항 조치 결과 보완 및 설계변경 요청 [KDU(대외)제23-692호, 2023.12.19.]

□ 설계변경 검토내용

- 의뢰부서 요청사항 반영 등에 따른 물량 증ㆍ감

‧ 천장높이 변경에 따른 FCU재설치, 덕트 높이 및 물량변경 등 반영

‧ 마감자재(타일, 도기, 수전류 등) 디자인 변경요청 반영

‧ 정수기 및 로봇카페용 위생배관 추가 설치 반영

- 기타 기계공사 변경내용

‧ 옥외 조경용 배관 위치 변경(지하1층 천정배관→옥외매립배관) 반영

‧ 오배수 배관 부식 발생 우려가 있어 재질 변경(주철관→PVC배관) 반영

‧ 지상1층, 지하층 옥외 노출 오배수 배관 동파 우려가 있어 배관보온 반영

ㅇ 설계변경 소위원회 자문의견 및 조치결과

연번	자문의견	조치결과
1	- 원가계산 제비율 적용기준 재검토 · 신규품목 기타경비 6.5% → 6.0%	- 반영함 · 신규품목에 대한 기타경비 6.0% 적용
2	- 팬코일유니트 재설치 재검토 요청 · 일반기기설치 이설 160%적용 재검토 · 팬코일유니트 재설치와 관련하여 근거자료 보완	- 반영함 · 일반기기설치 이설 160% → 140% 적용 · 근거자료 보완함
3	- 위생도기 관련 가격 및 설치여부 재검토 · 물가정보지에 있는 제품은 물가정보를 기준으로 단가대비표 재작성 · 다이슨 에어블레이드 설치여부 주관부서와 협의	- 반영함 · 가격 조사하여 적용함 · 주관부서와 협의함
4	- PE배관 융착식 접합 일위대가 품셈 참조 페이지 수정	- 수정완료
5	- 화재 안정성 및 PVC배관 내화성 여부 · 메탈히터 설치 적정성 및 화재 안정성, PVC배관 내화성 여부 등 검토요청	- 검토자료 첨부함.

ㅇ 공사비 증ㆍ감 현황

- 설계변경 소위원회 자문회의 결과 반영(조건부 가결)

구분	금액(원)
	심의요청 금액	심의결과 금액	증ㆍ감
총차	*************	*************	*************

- 공사비 증ㆍ감 현황

구분	금액(원)
	당초	변경	증ㆍ감
총차	*************	*************	***************
3차	*************	*************	***************

ㅇ 건설사업관리인 검토의견

- 설계변경 소위원회의 자문결과 지적사항에 대하여 상기와 같이 반영하였으며, 적정성을 검토한 결과 적합하다고 판단되어 수정된 설계변경 내역서와 같이 설계변경함이 타당한 것으로 사료됨

□ 보고자의견

ㅇ 건설사업관리기술인의 설계변경 소위원회 조치결과 및 설계변경 에 대한 검토보고 내용이 적정하다고 판단되어, 계약부서(총무부)에 설계변경 의뢰하고자 함.

붙임  건설사업관리단 검토보고 1부.  끝