설계변경 심의 소위원회 개최서

(제2정수장 약품투입동외2 안전시설 개선공사)

부 서 명	정수시설과
작 성 자	이 용 성
제 출 일	2023. 12. 20.(수)

○ 공사명: 구의아리수정수센터 제2정수장 약품투입동외2 안전시설 개선공사

○ 심의 위원회 의견

- 심의일시: 2023. 12. 20.(수) 10:00~

- 검토내용: 제경비 산정 및 적용 적정성

- 심의의견: 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 아래와 같이 의견 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

정수시설과장

***

12/20

적정함

함태광

위    원

주무관

***

강석윤

적정함

위    원

주무관

***

노성제

타당함

위    원

주무관

***

노운학

적정함

위    원

주무관

***

이희점

적정함

담    당

안전관리팀장

***

이용성

설계변경 심의 설명서

□ 공사개요

○ 공 사 명: 구의아리수정수센터 제2정수장 약품투입동외 2 안전시설 개선공사

○ 공사기간: 2023.09.11. ~ 2023.12.30.

○ 계약금액: **********

○ 계 약 자: ㈜경동하우징 대표 송득종

○ 공사내용

‣ 제2정수장 약품탱크동 워크웨이 및 안전사다리 설치

워크웨이 23m(폭 0.5m), 안전사다리 2개소(h=6.5m), 계단 5개소

‣ 주민친화구간(정수지 상부) 배수로 정비

배수로(트랜치) 설치 : 164m,  집수정 설치 : 4개소

‣ 제1문화재동 관람동선 노후·파손된 방부목 교체정비

A=155㎡(폭 2.5m)

□ 설계변경 사유 및 내용

○ 변경사유: 시공물량 증·감 및 제경비 실정산 등에 따른 계약금액 변경

○ 계약금액                                              (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증‧감	비고
계약금액	************	***********	***********

□ 심 의 사 항

○ 수량증감 및 제비율 산정 적정성 여부 등

붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제경비 검증확인서 1부.  끝.