아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시미래한강본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경(1회) 시행 및 변경계약 의뢰 (2023년 한강 취수장 주변 준설공사)

우리부서에서 추진중인 「2023년 한강 취수장 주변 준설공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회)을 시행하고 변경계약을 의뢰합니다.

1. 공 사 명 : 2023년 한강 취수장 주변 준설공사

2. 계약기간 : 2023.8.17 ~ 2023.12.31

************************

***************************

5. 계약금액 변경                                                (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증·감		비 고
* * *	****	*************	*************	**	***********
	***	***********	***********	**	**********
	***	*************	*************	**	***********

6. 준공기한 연장 : (당초) '23.8.17~'23.12.31 → (변경) '23.8.17 ~ '24.5.31

7. 변경사유 : 사업계획 변경에 따른 물량 증·감 및 공기연장 사항 반영

8. 예산과목 :

*****************************************************************************************

******************************************************************************************

붙임 : 1. 사업계획 변경 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서

3. 변경내역서(1회) 1부.

4. 변경합의서 1부.

5. 설계변경 자문의견서 각 1부.

6. 제비율 검증확인서 각 1부.  끝.

	치 수 과 장
주무관	박지수		치수과장	김창신		시설부장	12/19
이유국
협조자	주무관	김병수		기획예산과장	이강수		총무과장	박서영
시행	치수과-4741	(	2023. 12. 19.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0696	/전송	02-3780-0744	/	cp8203@seoul.go.kr	/	부분공개(5)