문서번호	급수운영과-20448
결재일자	2023. 12. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
서장원		류태현	전결 12/19
			이용구
협조

설계변경 심의 결과보고(1회)

[2023년 관악, 금천구 관내 상수도 시설물공사(단가계약)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12. 19.

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 심의 결과보고(1회)

[2023년 관악, 금천구 관내 상수도 시설물공사(단가계약)]

「2023년 관악, 금천구 관내 상수도 시설물공사(단가계약)」 업무 수행 중 현장 여건 변화에 따른 신규공종 및 물량 증 ․ 감에 대한 설계변경 심의를 완료하고 아래와 같이 보고드림.

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 관악, 금천구 관내 상수도 시설물공사(단가계약)

ㅇ 공사개요 : 제수변 정비 294개소, 변실정비 145개소

ㅇ 공사기간 : 2023. 6. 8. ~ 2024. 5. 31.

ㅇ 도 급 자 : 율토건설(주)   대표자 최연순

ㅇ 도 급 액 : 금980,050,330원

□ 설계변경 심의위원회 개최

○ 일    시 : 2023. 12. 19 16:00

○ 장    소 : 남부수도사업소 급수운영과(3층)

○ 심의내용 : 신규공종 및 계약물량 증, 감 사항 심의

○ 참석위원 : 위원장 급수운영과장외 심의위원 3명, 간사 및 입회자

□ 심의위원회 검토내용

○ 설계변경 타당성 : 타당

○ 계약 변동물량 계약단가 적정여부 : 적정

○ 제잡비 적정산정 및 적용 적정성 여부 : 적정

○ 각종 제반사항 준수 여부 : 준수

□ 설계변경 사유

ㅇ 현장여건 변화에 따른 신규공종 및 물량 변동(증, 감) 발생

ㅇ 지방계약법 시행령 제74조(설계 변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 신규공종 :「기계다짐(보통-램머80kg)」외 64개 공종

- 물량증가 :「보도용블록 인력철거」외 46개 공종

- 물량감소 :「아스팔트깨기(소형브레이커)」외 120개 공종

□ 설계변경 금액 : 변동없음

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
공사 원가	890,954,846	890,954,846
부가가치세	89,095,484	89,095,484
도 급 비	980,050,330	980,050,330	-

□ 설계변경 세부내용

ㅇ 주요공종 물량 증가내역

공 종	규 격	수 량			금 액(원)
		단위	당초	변경
되메우기(기계100%)양호	굴삭기(타이어) 0.18㎥	㎥	126	303	증) 322,848
제수밸브 부설 및 접합공	100mm (기계)	개소	5	22	증) 897,073
이탈방지압륜접합	100mm	개소	115	120	증) 142,635
원형밸브설치공(기초CON)	100mm	㎥	7	19	증) 6,367,500
교통정리원	야간	인	16	30	증) 3,298,428

ㅇ 주요공종 물량 감소내역

공 종	규 격	수 량			금 액(원)
		단위	당초	변경
아스팔트포장절단	200mm 이하	m	1960	795	감) 1,925,745
인력터파기(협소, 지장물)	견질토사1-2m	㎥	65	30	감) 1,313,496
제수밸브 부설 및 접합공	80mm (기계)	개소	67	31	감) 1,502,424
밸브 개폐비	150mm	회	83	26	감) 1,006,962
싸인보드카	정차시(야간)	일	21	15	감) 1,068,618

ㅇ 주요 신규공종 발생내역

공 종	규 격	수 량			금 액(원)
		단위	당초	변경
기계다짐(양호)	램머80kg(환토재)	㎥	-	292	증) 1,403,060
고압블록 포장	4.5DT(현장-집하장) 야간	a	-	0.32	증) 504,873
KP 이탈방지압륜접합	600㎜, 야간	개소	-	3	증) 689,124
부단수차단	600㎜, 야간	개소	-	3	증) 72,818,736
예초	기계사용(배수지 상부)	㎡	-	6,802	증) 1,965,778

□ 조치계획

ㅇ 설계변경 심의위원회 개최 결과 적정하게 변경된 것으로 심의된 바, 붙임과 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

붙임 : 1) 설계변경 검토보고 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.

3) 설계변경 심의 의결서 1부.  끝.