문서번호	정수시설과-3790
결재일자	2023. 12. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이용성		함태광	12/20
			성호준
협 조
	주무관			한미경
	주무관			김동석

『제2정수장 약품동외2 안전시설 개선공사』 설계변경 보고

2023. 12.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

『제2정수장 약품동외2 안전시설 개선공사』

설계변경 보고

우리센터『제2정수장 약품동외 2개소 안전시설 개선공사』에 대하여 다음과 같이 계약물량의 증·감이 발생였기에 설계변경 시행코자 함.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 구의아리수정수센터 제2정수장 약품투입동외 2개소 안전시설 개선공사

❍ 공사기간 : ’23.09.11.~ ’23.12.30.

❍ 계약금액 : *********

❍ 계 약 자 : *************

❍ 공사내용

‣ 제2정수장 약품탱크동 워크웨이 및 안전사다리 설치

워크웨이 A=22㎡ (폭 0.5m, 연장 44m), 안전사다리 설치 2개소

‣ 주민친화구간(정수지 상부) 배수로 정비

배수로(트랜치) 신설 : 160m,  집수정 신설 : 5개소

‣ 제1문화재동 관람동선 노후·파손된 방부목 교체정비

A=155㎡  (폭 2.5m, 연장 62m)

□ 설계변경 보고

○ 수량변경 내용

시설명	수 량		증·감	비 고
	당 초	변 경
데크 계단 논슬립 설치	0 m	62m	증 62m	25개소
약품동 안전발판	55m	23m	감 32m	폭 0.5m
약품동 계단	0개소	5개소	증 5개소	높이 1.5m
보도걷기 및 재포장	40㎡	72㎡	증 32㎡
고용개선지원금정산	1식	1식	감 1식	실 현장적용
4대보험 정산	1식	1식	감 1식	건강,연금,노인 등

○ 수량변경에 따른 공사금액 변경

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	비 고
공사비	공급가액	***********	***********	***********
	부가세	***********	***********	***********
	계	***********	***********	***********

□ 설계변경 심의(검토) 계획

○ 위 변경 내용에 대하여 자체 설계변경 심의위원회를 개최하고 심의결과에 따라 설계변경 시행코자 함

○ 설계변경심의 위원회

- 일 시 : 2023.12.20.(수) 16:00~

- 장 소 : 정수시설과 사무실

- 심의사항

‣ 설계변경의 타당성

‣ 제경비 산정 및 적용 적정성 여부

‣ 물량변동의 적정성 여부

‣ 각종 제반 규정 준수여부 등

- 위 원

구 분	직 급	성 명	비 고
위원장	******	*****
위 원	****	*****
위 원	****	*****
위 원	****	*****
위 원	****	*****

붙임 :  설계변경 내역서 1부.  끝.