현장중심! 민생중심! 더불어 행복한 성북
		성 북 구
수신자		내부결재
(경유)
제목	2023년 북악산 등산로 정비사업 설계변경 시행

'2023년 북악산 등산로 정비사업'에 대하여 아래와 같이 설계변경 하고자 합니다.

가. 사 업 명 : 2023년 북악산 등산로 정비사업

나. 기    간 : 2023. 10. 27. ~ 12. 25.

다. 사업금액 : *****************************

라. 시 공 사 : *****************

마. 변경사유 : 민원요청 및 현장 실정사항 반영에 따른 정비물량 조정 및 미집행 제경비 정산

바. 설계변경 금액 : ***********

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 감
총 공 사 비		***********	***********	**********
도급비	공급가액	***********	***********	**********
	부 가 세	**********	**********	*********
	계	***********	***********	**********
관 급 비		***********	***********	*********

사. 예산과목 : 푸른도시여가국 자연생태과, 생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호, 생태계 보전, 근교산 등산로 정비, 시설비(시비)

붙임  1. 설계변경 내역서 및 검증내역서 각 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 검토 보고서 1부.  끝.

주무관	김우진		생태여가담당	代곽병영		공원녹지과장	代김성기		도시관리국장	12/20
代김영욱
협조자	계약담당	조은숙		재무과장	代김미경
시행	공원녹지과-28605	(	2023. 12. 20.	)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168	/	http://www.sb.go.kr
전화	02-2241-3703	/전송	02-2241-6565	/	tgr0628@sb.go.kr	/	부분공개(5)