아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경(2차)시행에 따른 계약의뢰(수정_2023년 강남수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사)

1. 급수운영과-22376(2023.12.19)호와 관련입니다

2. 우리사업소에서 시행중인『2023년 강남수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사』에 대하여  설계변경(2차)시행 수정본을 아래와 같이 의뢰합니다.

가. 공 사 명: 2023년 강남수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사

나. 계 약 자: **************

다. 계약기간: 2023.07.17 ~ 2024.06.30. (2차수: 2024.1.1.~2024.6.30)

라. 설계변경 금액 : 변동없음

(단위 : 원)

구분		설계변경 금액
		당 초	변 경	증,감
총공사비		*************	*************	****
도급비	공급가액	*************	*************	****
	부가세	***********	***********	****
	계	*************	*************	****
관 급 비		***********	***********	****

공 종	당초	변경	증․감	비고
아스팔트포장	***	***	*****
보도블록포장	***	****	*******
아스팔트표층	***	*****	********

마. 설계변경 사유

- **********************************

공 종	내 용
*********************** *****************	**************

- *******

구 분	당초금액 (①)	변경금액		증·감 (①-②)	계약기간
		수정전	수정후(②)
총부기금액	1,714,006,900	1,714,006,900	1,714,006,900	변동없음
1차 부기금액	1,028,404,140	935,550,000	930,380,000	(감)98,024,140	2023년 (2023.07.17.~12.31)
2차 부기금액	685,602,760	778,456,900	783,626,900	(증)98,024,140	2024년 (2024.01.01.~06.30)

※ 수정내용

- 차수별 부기금액 조정                                         (단위 : 원)

바. 하자기간: 준공검사일로부터 2년

사. 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비, 수선유지비

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

- 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축, 소방용수시설 등의 설치 및 관리, 일반회계, 소방용수시설(신설) 보수, 시설비

붙임:  1. 설계변경(2차) 관련서류(수정본) 각 1부.

2. 합의서(설계변경-2차_수정본) 1부. 끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	장형준		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	12/20
박종일
협조자
시행	급수운영과-22486	(	2023. 12. 20.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4848	/전송	02-3146-4889	/	88501041@seoul.go.kr	/	부분공개(5)