문서번호	기전과-16483
결재일자	2023. 12. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
이승민	12/21
	최경주

서빙고 지하차도 동력반 지상화 공사

실정보고 및 설계변경(준공) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

서부도로사업소

(기전과)

서빙고 지하차도 동력반 지상화 공사

실정보고 및 설계변경(준공) 검토 보고

서부도로사업소장 : 최연우☎300-8300 기전과장 : 최경주☎8390 담당 : 이승민☎8402

서빙고 지하차도 동력반 지상화 공사의 실정사항 및 준공 설계변경 사항을 검토 보고드림

□ 추진근거

ㅇ 공사업체 실정보고서 제출[대승20231221('23. 12. 21.)호]

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명: 서빙고 지하차도 동력반 지상화 공사

ㅇ 계약금액: ************

ㅇ 공사업체: *******************

ㅇ 계약일자: 2023. 11. 2.

ㅇ 공사기간: 2023. 11. 6. ~ 2023. 12. 31.

ㅇ 주요공정

- 지상화 부지 조성 및 동력반 설치

ㅇ 예산과목

- 서부도로사업소 기전과, 재해 및 재난 예방, 재난 예방 및 복구, 재난예방(재난관리기금 재난계정), 시설비

□ 실정보고 및 설계변경 사항

ㅇ 주변 현장 여건(식목 등)을 고려한 지상 전기실 면적 축소

ㅇ 옥외 전기실 방우용 폴리카보네이트(지붕) 설치

ㅇ 옥외 전기실 점검 조명설비 설치

ㅇ 현장 상황에 따른 작업 물량 증·감 및 신규공종 추가

ㅇ 보험료 등 제경비 정산

ㅇ 주요 변경내용

공종	실정보고 내용	변경내용 및 세부물량	비고
*********	************ ****************	*************************** ***********************
*********	*********** ************** **	************************* ************************** ************************ ************************
*********	*****************	************************ ************************* ********************

ㅇ 금액변경내역

******		********	********	********	****
****		***********	***********	**********
***	****	***********	***********	**********
	***	**********	**********	********
	*	***********	***********	**********
***		**********	**********	********

□ 보고자 의견

ㅇ 변경 사항 검토결과 지상 전기실 부지 조성에 따른 내역 및 금액실정보고 사항이 타당하다 판단되어 상기 내역으로 설계변경 시행 및 준공 진행코자함

붙임  1. 실정보고 및 변경내역서 1부.

2. 제비율검증확인서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.