문서번호	시설관리과-23457
결재일자	2023. 12. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
시설관리팀장		시설관리과장	강남수도사업소장
김재영		代이정훈	12/21
			박기용
협조

방배배수지(3지) 내부방식공사 준공기간 연기 검토 보고

2023년 12월

강남수도사업소

(시설관리과)

방배배수지(3지) 내부방식공사

준공기한 연기 검토 보고

우리사업소 시행중인「방배배수지(3지) 내부방식공사」에 대해 감독기관인

서울시설공단으로부터 공기연장 검토보고서가 제출되어 검토하고 그 결과를 보고 드림

※ 관련근거:공사감독2처-17416('23.12.20)-공기연장 검토보고서 제출

Ⅰ		개 요

공 사 명 : 방배배수지(3지) 내부방식공사

공사개요 : 도막식 방수방식 : 7,200㎡ 등 3개소

계약업체 : (주) 서림에이엔씨 최춘서

계약기간 : 2023.8.3.(착공일) ~ 2024. 6.16.

계약금액 : ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊원(변경없음)

감 독 처 : 서울시설공단 공사감독2처

공 정 율 : ***%

○ 완료구간/잔여구간 : ***************/****************

Ⅱ		준공기한 연기검토

준공기한 연기 사유

○ *************************

- ****************

- ****************

○ *************************

- ****************

- ****************

준공기한 연기 요청일

구 분		당 초	변 경	증·감 (증기간)	비 고
공사 기간	총차	2023.8.3~2024.6.16	*****************	(증) **일
	1차	2023.8.3~2024.12.31	*****************	(증) **일

Ⅲ		사업소 검토결과

준공기한 연기 사유 검토 사항

○ *************************

- ****************

- ****************

○ *************************

- ****************

- ****************

○ 귀책사유 : 발주처

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ		조치의견

위와 같이 검토결과를 행정지원과에 준공기한 연기에 따른 변경계약을 체결 의뢰하고 서울시설공단에서 계약사항 변경사항을 통보코자 합니다.

첨 부 : 준공기한 제출서류(시설관리공단) 각 1부. 끝.