아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(퇴계로 장기사용 배수관 정비공사)

우리 사업소에서 시행하는 『퇴계로 장기사용 배수관 정비공사』에 대하여 계약물량 증감 발생에 따라 다음과 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명: 퇴계로 장기사용 배수관 정비공사

2. 계 약 자: **************

3. 공사개요: 관로부설(D=700mm, L=430 m)

4. 계약기간: 2023. 4. 26. ~ 12. 16.

5. 설계변경 내역                                                      (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도급비	***********	***********	**************	****************
공급가액	***********	***********	**************
부가세	**********	**********	**************

※ 설계변경 세부내역 : 따로붙임 참조

6. 설계변경 사유: 시공물량 증·감, 신규 공종 및 신규 자재 발생

7. 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비(장기사용 송배수관 정비 22107)

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 합의서 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.

주무관	성영한		급수관리팀장	代이한수		급수운영과장	김상웅		중부수도사업소장	12/21
장화영
협조자
시행	급수운영과-23310	(	2023. 12. 21.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 3층 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2179	/전송	02-3146-2189	/	chak2524@seoul.go.kr	/	부분공개(5)