아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부공원여가센터
수신	공원운영과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(여의도공원 자전거도로 포장공사)

1. 여의도공원관리사무소-11900호(2023. 12. 21.)와 관련입니다.

2.「여의도공원 자전거도로 포장공사」와 관련, 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 여의도공원 자전거도로 포장공사

나. 공사기간: 2023. 11. 28. ~ 2024. 2. 15.

다. 계약금액: 금89,746,000원(금팔천구백칠십사만육천원)

라. 도 급 자: 천리토건(주) 대표 천덕복

마. 준공기한 연기

- 당초: 2023. 11. 28. ~ 2024. 2. 15.

- 변경: 2023. 11. 28. ~ 2024. 5. 7.

바. 연기사유: 동절기 포장공사(아스콘포장, 미끄럼방지포장) 시 품질저하 및 하자발생 우려 등이 있어 공사기간을 동절기 이후로 조정

사. 지체상금 부과여부: 미부과(귀책사유: 서부공원여가센터)

붙임  1. 준공기한 검토보고 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.

	여의도공원관리사무소장
시설팀장	김대영		여의도공원관리사무소장	12/21
이정수
협조자
시행	여의도공원관리사무소-11903	(	2023. 12. 21.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 여의공원로 68, 여의도공원관리사무소 (여의도동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-780-2713	/전송	02-786-2599	/	kdy9720@seoul.go.kr	/	부분공개(5)