문서번호	시설관리과-21531
결재일자	2023. 12. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
이연한		代임복섭	12/21
			권승계
협조

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

(2023년 은평구 상수도공사 등 재해예방 기술지도 용역-1차)

2023. 12. 21.

서부수도사업소

(시설관리과)

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

(2023년 은평구 상수도공사 등 재해예방 기술지도 용역 )

시설관리과장: 권승계 ☎3146-3690 시설운영팀장:  신동철 ☎3701 담당자: 이연한 ☎3698

우리사업소에서 시행중인「2023년 은평구 상수도공사 등 재해예방 기술지도 용역」에 대한 설계변경 심의결과를 다음과 같이 보고 합니다.

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명: 2023년 은평구 상수도공사 등 재해예방 기술지도 용역

□ 용 역 사: 광진종합세이프㈜ 대표 구자진

□ 용역기간: 2023. 3. 8. ~ 2024. 6. 30.

□ 용역금액: 24,631,200원

□ 용역개요

○ 은평구에서 시행하는 상수도공사 등 재해예방 기술지도

Ⅱ		설계변경 근거

□ 지방자체단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및 동법 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약금액 조정)

□ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부예규 제252호-2023.7.1.)

- 제9장 계약 일반조건 제6절 용역 과업내용 변경 및 제7절 계약금액의 조정

Ⅱ		설계변경 내용

□ 설계변경 사유

○ 1차수 용역 시행에 따른 기술지도 회수 변경

(단위 : 회)

구분		당초	변경	비고(증·감)
기술지도 회수	총 회수	120	120
	1차(2023년) 회수	16	14	-2
	2차(2023년) 회수	104	106	2

<!--ENCRYPTED_CLIPDATA-->yInwbiR0WBRBkZOiPAN54tAOJcYx4PrK3Dd6soTHp1bbZyBHKo+qnNF3kVJGmIgqrRAMqhMxu0GJVe+u7/jsgm12cH7nKPQ7qI8eeXTwZTOwYCnJL87JsSKz9+x+niA5MzDm79s4bs3IqOIgOLIsjLZBsyyRMpG2gY0/8XQAvqP6DMshbLtowjfmTztSc5OO+c1V4U4KJ9ZVSv+omm3kjGVb1VZR1hg9BLX1wb8JiDnoDxSk8vNutYqH1gXyW+RKkUiOgcJ6BdDy00A4qTCZv9jyMRE34LTDmW6ss3Gftoa6b1E=

□ 차수별 부기금액 변경내용

(단위 : 원)

구분		당초	변경	비고(증·감)
용역비	총 부기금액	26,631,200	26,631,200
	1차(2023년)	3,081,100	2,696,100	-385,000
	2차(2023년)	21,550,100	21,935,100	385,000

Ⅲ		심의회 개최 결과

□ 일 시: 2023년 12월 20(수) 17:00

□ 장 소: 시설관리과 사무실

□ 위 원: 위원장(시설관리과장)외 4명(6급 신동철, 6급 김용섭, 6급 박상열, 6급 신정우)

□ 심의결과: 원안대로 적용

Ⅳ		조치의견

□ 상기와 같이 심의위원회 심의결과를 반영하여 설계변경을 시행하고,     행정지원과에 계약 의뢰코자 함.

붙임 1. 설계변경 심의 의결서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.