문서번호	여의도공원관리사무소-11899
결재일자	2023. 12. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
시설팀장	여의도공원관리사무소장	서부공원여가센터소장
김대영	이정수	12/21
		代강종희

- 여의도공원 자전거도로 포장공사 건설폐기물 처리용역 -

준공기한 연기 검토보고

2023. 12.

서부공원여가센터

(여의도공원관리사무소)

- 여의도공원 자전거도로 포장공사 건설폐기물 처리용역 -

준공기한 연기 검토보고

우리 센터에서 추진 중인 "여의도공원 자전거도로 포장공사 건설폐기물 처리용역" 와 관련, 다음과 같이 준공기한 연기를 검토 보고 드림

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 여의도공원 자전거도로 포장공사 건설폐기물 처리용역

ㅇ 용역내용 : 건설폐기물 운반 및 처리 744톤

ㅇ 용역기간 : 2023. 11. 28. ~ 2024. 2. 15.

ㅇ 도 급 액 : ********

ㅇ 도 급 자 :****************

□ 준공기한 연기검토

ㅇ 준공기한 연기

구분	변경사항		비고
	당초	변경
****	************* *** ************	************* *** ***********

ㅇ 연기사유 : ***************************  ********************

※ 본공사 준공기한 연기 : 2024. 2. 15. → 2024. 5. 7.

ㅇ 연기사유 귀책소재 : 서부공원여가센터

ㅇ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 행정사항

ㅇ 계약부서에 계약기간 연장 요청.  끝.