문서번호	미래첨단교통과-18367
결재일자	2023. 12. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		대중교통정보팀장	미래첨단교통과장
김영민		가순종	12/22
			이수진
협 조

2023년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 및 교체 통신공사

설 계 변 경 ( 정 산 )   보 고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

도 시 교 통 실

(미래첨단교통과)

2023년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 및 교체 통신공사

설 계 변 경 ( 정 산 )   보 고

미래첨단교통과장 : 이수진☎2133-4950 대중교통정보팀장 :가순종☎4968 담당 : 김영민☎4948

우리과에서 시행중인 「2023년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 및 교체 통신공사」에 대하여 감리사로부터 설계변경 요청서가 접수되어 이에 대한 검토보고임

Ⅰ		관련근거

ㅇ 통신공사 계약변경(정산) 기술검토보고서 제출의 건

(진감 23-708호, 2023.12.15.)

Ⅱ		공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 및 교체 통신공사

ㅇ 공사위치 : 종로구 승가사입구(01-148) 버스정류소 등 184개소

ㅇ 공사기간 : 2023. 9. 4. ~ 12. 31.

ㅇ 공사내용

- 버스정보안내단말기(BIT) 34개소 설치 및 노후 BIT 150개소 교체

ㅇ 도급금액 : 82,752천원

ㅇ 도 급 자 : ****************

ㅇ 감 리 사 : ******************

Ⅲ		추진경위

ㅇ '23. 3. 24. : 추진계획 수립

ㅇ '23. 8. 4. : 공사발주

ㅇ '23. 8. 31. : 공사계약

※ 현 공정률 90%

Ⅳ		설계변경 내용

ㅇ 설계변경 사유

- 물량 변경 및 보험료 정산

ㅇ 주요 변경내역

공종(품명)	규 격	단위	수 량			금액증감 [천원]
			당초	변경	증감
******	***	*	***	***	****	*************
******	***	*	***	***	****	**
********	*********	*	***	***	*****	*************
********	*********	*	***	***	*****	*************

ㅇ 보험료 등 정산

(단위 : 원)

구 분	(조정)계상금액	실납부(사용)금액	정산반영금액
*****	*********	*	*
*****	*********	*	*
*********	*********	*	*
*******	*********	*	*
*********	*******	*	*
*******	*********	*	*

ㅇ 공사비 변경 내용

(단위 : 원)

구 분	공 사 비			비 고
	당 초	변 경	증 감
****	**********	**********	******************
*****	*********	*********	*****************
*******	**********	**********	******************

- 예산과목 : 미래첨단교통과, 과학적인 교통정보서비스 구현, 과학적                 교통운영체계 구축(교통관리계정), 버스정보안내단말기                 (BIT) 설치, 시설비및부대비, 시설비

ㅇ 감리사 검토 의견

- 설계변경내역서 검토 결과 당초 계약내역과 실시공 차이로 감액

요인이 발생한 바 변경내용이 적정하다고 사료됨

Ⅴ		보고자 의견

ㅇ 감리사의 설계변경(정산) 요청사항을 검토한 결과 설계변경 계약요청      내용이 적정한 것으로 판단되어 재무과에 변경계약 의뢰 및 준공      처리코자 함

Ⅵ		행정사항

ㅇ 설계변경(정산)에 따른 변경계약 의뢰              ………(재무과)

붙임  설계변경 보고서 1부.  끝.