아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 계약의뢰(노량진배수지(3지)내부방식 공사)

우리 사업소에서 시행 중인 공사에 대하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : ******************

나. 공사개요 : ********************************

다. 계 약 자 : ****************

라. 설계변경 사유 : 현장여건에 따른 차수별 공사수량 및 계약기간 조정

마. 계약기간 변경내용

구분	계약기간		계약금액			비고
	당초	변경	당초	변경	증감
총차수	`23.10.5.~`24.9.18.	`23.10.5~`24.9.18.	1,535,241,500원	1,535,241,500원	-	총차수 기간/금액 변경없음
1차수	`23.10.5.~`23.12.31.	`23.10.5.~`24.5.31.	579,064,500원	1,082,476,300원	증) 503,411,800
2차수	`24.1.1.~`24.9.18.	`24.6.1.~`24.9.18.	956,177,000원	452,765,200원	감) 503,411,800

사. 예산과목 : ****************************************

붙임  1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 설계변경합의각서 1부.

4. 계약금액 검증확인서 1부.  끝.

4. 3. 변경계약합의서 1부.

	시 설 관 리 과 장
주무관	정지덕		시설관리팀장	차승환		시설관리과장	12/21
代오영진
협조자
시행	시설관리과-22828	(	2023. 12. 21.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 2층 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4608	/전송	02-3146-4639	/	duckbug@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)