아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 계약 변경 의뢰(계약기간 변경)

1. 건축기획과-15472호(2023.7.17.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 '제3차 서울 건축기본계획 수립 용역'의 계약을 아래와 같이 변경하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 제3차 서울 건축기본계획 수립 용역

나. 계 약 자 : (재)서울연구원

다. 계약금액 : 금 235,000,000원(금이억삼천오백만원정)

라. 변경내역 : 용역 기간 변경(2차)

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	2021.10.26.~2023.07.22.(총차)	2021.10.26.~2023.10.22.	3개월 연장
	2022.03.28.~2023.07.22.(2차)	2022.03.28.~2023.10.22.
용 역 비	335,000천원(총차)	335,000천원	변동없음
	235,000천원(2차)	235,000천원

마. 변경사유 : 계획의 완성도를 제고하고 공청회, 건축정책위원회 심의 등 정해진 법적 절차 추진을 위해 기간 연장 필요

붙임  1. 계약기간 변경 계획 1부.

2. 용역 계약기간 변경 요청서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	건 축 기 획 과 장
주무관	우종우		건축정책팀장	박신규		건축기획과장	07/17
박순규
협조자
시행	건축기획과-15503	(	2023. 7. 17.	)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124, 서소문2청사 14층 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-7100	/전송	02-768-8926	/	roora23@seoul.go.kr	/	부분공개(5)