문서번호	토목부-25006
결재일자	2023. 12. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장		시설국장
이나영	박운용	이임섭		12/26
				안대희
협 조

『양재대로 구조개선사업』공기단축 방안 검토 보고

2023. 12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

『양재대로 구조개선사업』공기단축 방안 검토 보고

도시계획시설 변경결정 지연, 한전 전력구 등 추가 지장물 이설 등으로 '26년 12월 준공이 예상되는 상황에서, 개포주공 재건축단지 주민들의 공기단축 요구 집단민원에 대응코자 공기단축 방안 검토보고 드림.

Ⅰ		공 사 개 요

○ 위    치 : 강남구, 구룡터널 사거리 ~ 삼성의료원 교차로(개포4단지)

○ 규    모 : 폭 4차로, 대모지하차도 연장 1,174km

○ 기    간 : '18. 7. ~ '24. 12.

○ 사 업 비 : 1,940억 원

○ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외1개사

○ 감 리 단 : (주)동명기술공단

Ⅱ		추 진 경 위

○  '18.07 : 대모지하차도 공사착공

○  '19.02.~08. : 개포2단지(1,957세대), 3단지(1,320세대) 준공 및 입주

○  '23.03 : 개포4단지(3,775세대) 준공 및 입주

○  '23.06.22 : '대모지하차도 공사기간 연장 반대 및 공사기간 단축 요청의 건' 접수

**********************

○  '23.06.23 : '양재대로 공사기간 연장 반대 및 공사기간 단축 요청의 건' 접수

- ***********************************

○  '23.06.28. : 양재대로 구조개선(대모지하차도) 민원관련 공기단축방안 검토지시

○  '23.08.31. : 공기단축 관련 면담 실시

- ****************************************

○  '23.09.26 : 양재대로 구조개선사업 주민설명회 실시

- **************************************************************************************

- 공기지연 사유 및 추진계획 설명(공기단축 방안 마련 예정)

Ⅲ		검 토 사 항

○ 공기단축 방안 검토배경

- 도시계획시설 변경결정 지연 및 한전 전력구, 광역상수관 등 지장물 협의, 지장물 이설 상호 간섭으로 공기 지연되어 '26. 12월 준공 예상되며,

- 주변 개포 1~4단지 재건축사업이 준공되고 많은 시민들이 입주함에 따라 소음과 분진, 교통불편 민원 및 공기단축 요구 집단민원 제기 됨.

- 이에 따라 교통정체가 심하고 공기가 많이 소요되는 교차로 구간에 공사중 교통처리대책 개선 및 공기단축 방안 마련이 필요함.

○ 대상구간(교차로 2개소)

*****	******	*******	***
***********	****	***************************************
***********	**	***********************************
*****		********************************

○ 공기단축 방안 비교

****	*************	** *************	*** *************	**
********** ********* ************* *******	*	현장타설	*
*****	**	**	**
*******	**	**	**
****	********	*******	*******
**************	***************************** ************** ***************	**************************** ************** **************	**************************** ************** **************
***** *******	************ **********	************ *****************	************ *****************
*****		*

○ 기대효과

- 교차로구간 공사기간 단축

·구룡마을입구 교차로 : 당초 24개월 → 변경 18개월(감 6개월)

·개포3~4단지 교차로 : 당초 14개월 → 변경 10개월(감 4개월)

- 교통정체가 심한 교차로 구간의 "공사 중 교통전환 단계축소"

⇒ 교통정체 및 주민불편 최소화

·구룡마을입구 교차로 : 당초 20단계 → 변경 6단계(감 14단계)

·개포3~4단지 교차로 : 당초 10단계 → 변경 4단계(감 6단계)

Ⅳ		검토의견 및 조치계획

***********************************************************************************************************************

***************************************************************************

*******************************************************

붙임 : 책임건설사업관리기술인 검토의견서 1부.  끝.