문서번호	공원시설과-4984
결재일자	2023. 12. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	공원부장
유재우		양돈욱	12/26
			허현수
협 조
	주무관			신승민

『2023 한강공원 눈썰매장 개장 관련 전기시설물 공사』

설계변경 (정산)검토 보고

2023. 12.

공   원   부

(공원시설과)

『2023 한강공원 눈썰매장 개장 관련 전기시설물 공사』

설계변경 (정산)검토 보고

우리 본부에서 시행중인 『2023 한강공원 눈썰매장 개장 관련  전기시설물 공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 함

공사개요

○ 공 사 명 : 2023 한강공원 눈썰매장 개장 관련 전기시설물 공사

○ 공사기간 : 2023. 12. 7. ~ 12. 30.

○ 도 급 비 : ***********

○ 계 약 자 : *****************

○ 공사내용 : 여의도 눈썰매장 분전반 신설, 변압기 절연유 교체 등

구 분	작 업 내 역	비 고
당 초	- 잠원, 여의도 눈썰매장 변압기 절연유 교체	- 변압기 절연유 교체작업 취소
변 경	- 뚝섬 눈썰매장 조명탑(2개소) 보수 - 뚝섬 눈썰매장 메가 전동윈치 전원 연결 공사	- 뚝섬 눈썰매장 야간 운영 - 뚝섬 눈썰매장 슬로프 측 신규장비 (메가 전동윈치) 추가

설계변경 사항

○ 실정보고 제출 건(공원시설과-4933호, 2023. 12.22.)

- 눈썰매장 운영 여건에 의하여 작업 내역이 아래와 같이 변경

○ 작업 내역 변경에 따른 시공물량 변경

**********************************************************

**************************************************************

*******************************************************

********************************************************

********************************************************

********************************************************

********************************************************

○ 계약금액 변경

(단위 : 원)

구 분		공 사 비		증 감
		당 초	변 경
총 공 사 비		**********	**********	**	*********
도급액	공급가액	**********	**********	**	*********
	부가세	*********	*********	**	*******
	계	**********	**********	**	*********

○ 관련근거

- ***********************************

-  ****************************************

-  원활하고 안전한 눈썰매장 운영을 위하여 위 작업 내역 변경이 필요하다고 인정됨

○ 예산과목

- 미래한강공원 공원시설과, 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선,

한강공원 수영장 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비

보고자 의견

○ 시공물량 변경내역이 적정하다고 판단되는바, 위 내용대로 설계변경(정산)을 시행코자 함

붙임  1. 변경설계서 1부.

2. 실정보고서 1부.

3. 검증확인서 1부.

4. 합의각서   1부.  끝.