문서번호	물재생계획과-18907
결재일자	2023. 12. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하수관리팀장	물재생계획과장
신현우		정한영	12/27
			박홍봉
협 조
	하수계획팀장			류춘광
	하수정비팀장			안준회

2023년 하수관로 정비사업 추진결과 보고

2023. 12.

물재생계획과

(하수관리팀)

2023년 하수관로 정비사업 추진결과 보고

노후 · 불량 하수관로에 대한 체계적인 정비를 통해 저지대 침수피해 및 도로함몰을 예방하고 안전하고 쾌적한 도시환경을 구축하기 위해 시행한 2023년 하수관로 정비사업 추진결과를 보고드림.

□ 하수관로 정비사업 추진계획

ㅇ 노후·불량 하수관로 정비 : L = 173km

- 통수능 부족 하수관로 신설개량

- 노후·불량 하수관로 정비

- 원형관로 및 사각형거 보수보강 등

ㅇ 소구역 하수관로 종합정비 : L = 67km

□ 하수관로 정비사업 추진실적

ㅇ 세부 추진실적

구 분		계획연장 (km)	정비연장 (km)	공정율	비고
계		240	192.1	80.1%	BSC 목표 240km
노후·불량 하수관로		173	155.2	89.7%
	신설개량 등	82	70	85.4%
	원형관로 보수보강	48	45.7	95.2%
	사각형거 보수보강	43	39.5	91.9%
소구역 종합정비		67	36.9	55.1%

※ 방재성능목표 상향(지선 10→30년, 간선 30→50년)에 따른 설계빈도를 반영하기 위해 공사중지 및 재설계로 인한 착공지연

ㅇ BSC 성과 목표 대비 80.1% 달성

□ 향후계획

ㅇ '23년 하수관로 정비사업 추진결과를 핵심사업 균형성과관리(BSC)실적에 반영

ㅇ 상향된 설계빈도 반영 및 2024년 성과목표 달성하기 위해 공정관리 철저

붙임 : 2023년 하수관로 정비실적 1부.  끝.