문서번호	급수운영과-11044
결재일자	2023. 12. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
박찬종	이상환	송헌영		12/27
				권민
협 조

2024년 수질자동측정기 교체 및 신규 설치 계획

2023. 12.

상수도사업본부

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2024년 수질자동측정기 교체 및 신규설치 계획

급수부장 :송헌영☎3146-1401 급수운영과장 :이상환☎1460 담당 :박찬종☎1461

공급계통의 실시간 수질관리 및 안정적 운영을 위하여 노후 수질자동측정기 교체와 신규 설치(배수지 5개소)를 추진하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

□ 문래동 혼탁수 발생 관련 종합개선대책(2019. 7. 17)

□ 실시간 수질모니터링 확대 추진 계획(2020. 3. 9)

□ 2023년 노후 수질자동측정기 성능평가 결과 (2023. 7. 3.)

Ⅱ		수질측정기 현황

□ 공급계통 수질자동측정기 현황                   ('23.12월 기준)

구 분	지점(개소)	측정기(대)	측정항목	공개항목
계	516	539	탁도, 잔류염소, pH, 전기전도도, 수온	탁도, pH, 잔류염소
배수지	90	113
아리수올림터	25	25
수도꼭지	401	401

□ 노후도 평가 결과

(단위:대)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
노후 측정기	21	7	42	94	135	104	106
교체 대상	15	0	8	10	25	18	6

※ 수질자동측정기 내용연수 10년(조달품 내용연수 조달청 고시 제2021-41호)

Ⅲ		추 진 개 요

□ 사 업 명: 2024년 노후 수질자동측정기 교체 및 신규 설치

□ 사업기간: ’24년 1월 ~ 12월

□ 사업내용

ㅇ 내용연수 경과 노후 수질자동측정기 교체 및 배수지 신규설치

- 5항목 측정기 및 수압계 교체 11대

□ 발주방법: 일반공개경쟁(적격심사)

□ 사 업 비: 407백만원

ㅇ (산출근거) 5항목 및 수압계 37백만원×11대

□ 예산과목: 아리수 수질자동측정기 설치, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 추진계획

'23년 12월	⇒	'24년 2월	⇒	'24년 2~4월	⇒	'24년 5~10월
계획수립		사전절차 진행		사업발주 및 계약		측정기 설치공사 시행 및 준공
본부		본부		본부		본부, 사업소

Ⅳ		세부 추진계획

□ 사업소별 설치(교체)대상

(단위:대)

구분	계	중부	서부	북부	강서	남부	강남	강동
대상	11	1	3	1	-	-	5	1
노후측정기	6	-	2	-	-	-	4	-
신규(배수지)	5	1	1	1	-	-	1	1

□ 설치(교체)대상 세부내역

구분	계	설치지점(설치년도)	비고
노후측정기	6대	마포동쌍용아파트(’10), 진관배수지(’09), 반포본동(’11), 삼성증압장(’09) , 자곡증압장(’09), 반포자이(’09)
신규(배수지)	5대	가회배수지, 할미당배수지, 우이배수지, 일원배수지, 거마배수지

□ 추진 일정

ㅇ 노후 수질자동측정기 교체 등 사업추진 계획 수립	’23.     12월

ㅇ 사업발주 및 계약	’24. 2 ~ 3월

- 계약심사 및 입찰공고 등	’24. 2~3월

- 사업자 선정 및 계약	’24.   4월

ㅇ 노후측정기 교체 등 사업추진 및 준공	’24. 4 ~ 11월

Ⅴ		행 정 사 항

□ 사업소 담당부서별 협조사항

업무내용	담당부서	협조부서
배수지 신규 설치지점 선정	본부 행정지원과	본부 급수운영과
노후측정기 교체 및 신규 설치	본부 급수운영과	사업소 행정지원과
배관공사 등 기초공사	사업소 시설관리과, 급수운영과	사업소 행정지원과

붙임 : 2023년 노후도 평가 결과 1부. 끝.