문서번호	정수시설과-14251
결재일자	2023. 12. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
김성준		전훈	12/28
			代최재욱
협 조
	주무관			박은경
	주무관			김희송
	주무관			박희정
	주무관			김규한

「1정수장 환기설비 개선공사(2단계)」 통합시운전 및 기계공사 정산 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

「1정수장 환기설비 개선공사(2단계)」

통합시운전 및 기계공사 정산 보고

'1정수장 환기설비 개선공사(2단계)' 사업과 관련하여, 설치완료에 따른 통합 시운전을 실시 및 기계공사 정산사항을 보고드림.

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명: 취·정수장 환기설비 설치

- ('22년)1정수장 환기설비 개선공사 1단계, ('23년)1정수장 환기설비 개선공사 2단계

ㅇ 대    상: 정수장(여과지, 관랑 및 침전지 하부 공동구 등) 환기설비 설치

ㅇ 기    간: 2023. 5. ~ 12.

ㅇ 발주금액: ***************(배정예산: 1,500,000,000원)

구분	계약명	계약기간	발주금액	계약금액	업체
기계 (공사)	암사아리수정수센터 1정수장 환기설비 개선공사(2단계)	**********************	**************	************	*************
전기 (공사)	1정수장 여과지 환기설비 개선(2단계) 전기 공사	**********************	************	************	*******
제어 (구매)	환기제어시스템 제작구매 (1여과지 3,4계열)	**********************	************	************	**********

□ 통합시운전 개요

ㅇ 일    시: 2023. 12. 21. ~ 12. 26.

ㅇ 장    소: 1정수장 여과지, 응집지 기계실, 침전지 밸브실 및 전기실 등

ㅇ 내    용: 1여과지 환기설비 기계, 전기 및 자동제어 통합 시운전

- 기계설비: 환기설비 벨트 회전방향 및 덕트 급·배기 확인

- 전기설비: 현장판넬 조작에 따른 환기설비 정상작동 여부

- 자동제어: 원격운전 조작에 따른 환기설비 정상작동 여부

□ 통합시운전 결과

ㅇ 현장 시운전

*	*	*	*
*******	*******	***********	***********

ㅇ 자동제어 운전

*	*
************	************	*************	***********

ㅇ 처리의견: 현장 및 원격 운전에 따른 설비에 문제가 없어 준공처리하고자 함

□ 정산사항

ㅇ 변경사유: 기계공사 계약내역서에 계상된 경비 정산감액

- 근거:「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제9장(계약 일반조건) 제9절 (검사와 대가지급) 12호(공사·용역·물품 국민건강보험료 등의 사후정산)

ㅇ 정산금액: ***********************************************

ㅇ 경비 정산내역 *******************************

비 목		계약금액(원)	정산금액(원)	감 액(원)	정산내용
경비	건 강 보 험 료	*********	*********	************	********
	장기요양보험료	*******	*******	************	*******
	산업안전보건관리비	**********	*********	************	*******
일 반 관 리 비		**********	**********	************	*******
이 윤		**********	**********	************	*******
부 가 가 치 세		**********	**********	************	*******
합 계				************	*****

□ 행정사항

ㅇ ********************************************

계약건명	설계변경금액	준공(정산)금액	증·감액
암사아리수정수센터 1정수장 여과지 환기설비 개선공사(2단계)	************	************	*************

붙임  1. 준공계 1부.

2. 준공도면 1부.

3. 준공내역서 1부.

4. 준공사진 1부.

5. 간접비 정산서류(보험료, 산업안전보건관리비) 2부.

6. 합의각서 1부.  끝.