문서번호	기전과-16885
결재일자	2023. 12. 28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김성균		12/28
		代정영술
협 조

「지하차도 진입차단 전광표지 통신공사」

준공검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  12.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「지하차도 진입차단 전광표지 통신공사」

준공검사 결과보고

서울시 지침인 지하차도 풍수해 재난대응 강화대책의 일환으로 추진한 진입차단 전광표지 통신공사의 준공검사 결과 보고드림.

1		관련 근거

□「기전과-9307(2023.8.22.)」: 사업추진 계획보고

□**************************************

2		사업 개요

□ 사 업 명 : 지하차도 진입차단 전광표지 통신공사

□ 위    치 : 지하차도 5개소 9대

- 전광표지판 설치 위치 및 수량

·퇴계로 2대, 모래내 2대, 서빙고 2대, 잠수교북단 1대, 월드컵 2대

□ 사업목적 : 지하차도 침수 시 진입차단을 위한 안내문구를 즉시 표출하여 시민의 안전을 보호하고, 평시에는 교통안전 관련 문구 표출하여 안전운전을 유도하고자 함.

□ 계약현황

- 계약기간 : 2023. 09. 06. ~ 12. 20. (착공일 : 09. 06.)

· 1차 연장 : 11. 15. 까지 / 2차 연장 : 11. 30. 까지 / 3차 연장 : 12. 20. 까지

⇒ 연장 사유 : 병행 공정인 진입차단시설 설치공사 지연

- 계약금액 : **************************

- 계약업체 : *******************

- 계약방법 : 수의1인견적(여성기업)

□ 사업규모 : 진입차단 전광표지 설치 통신공사 1식

- 문자전광판 설치공사(3종)

·퇴계로(왕복 4차로) 2대 : 4,000 × 460

·모래내(왕복 2차로) 2대 : 2,380 × 460

·서빙고(왕복 2차로) 2대, 잠수교북단(왕복 2차로) 1대, 월드컵(왕복 4차로) 2대 : 1,420 × 460

- 케이블 공사

·제어함체, 분전반, 전원·통신케이블 설치

- 종합시험

·원격제어 구축 및 프로그램 설정 등

□ 준공개요

- 준공일 / 준공검사일 : 2023. 12. 20. / 2023. 12. 27.

- 준공금액 : **************************

□ 검사내용

- 시공현장 : 자재 규격·수량·외관 상태 확인, 위치 및 공종 별 시공상태 확인, 마무리 시공 및 현장정리 상태 확인 등

- 준공서류 : 준공내역서, 사진대지, 고용·산재보험료 완납 증명서, 국세·지방세 납세 증명서, 산업안전보건관리비 사용내역 등 확인

3		검토 의견

준공 검사 결과

□ 현장 검사 결과 이상 없음

□ 계약상대자가 제출한 준공서류 검토 결과 이상 없음

□ 준공 전 설계변경 없이 당초 계약내역대로 준공

- 당초 본 공사는 공사기간 1개월 미만으로 보험료(건강, 연금, 노인장기요양) 적용 제외 하였고, 공기 연장에 따라 금액 계상하여 변경계약을 추진하려 하였으나 계약상대자 측 사용 증빙 내역이 없어 최초 계약내역에서 변동 없이 준공처리 함.

종합 의견

□ 준공 검사 결과 사업 목적에 맞게 적절히 시공을 완료하였기에 제출한 준공서류를 바탕으로 준공처리하고자 함.

4		행정 사항

□ 준공검사조서 제출( → 관리단속과)

붙임  1. 준공계 1부.

2. 준공내역서 1부.

3. 준공사진대지 1부.  끝.