의원 요구 자료 제출

시 행	문화시설과-10660	(	2023. 12. 29.	)
접 수		(		)
결재일자	2023. 12. 29.
공개여부	부분공개(5)
수 신 자	수신자 참조
수신자	기획담당관, 문화정책과장

주무관	문화시설3팀장	문화시설과장	문화본부장		결재
김한종	최우진	황승일	12/29
			최경주
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 4140번, 김영호의원, 교육위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

김영호 국회의원(교육위원회,더불어민주당, 서대문구을)

요구번호 : 4140

1. 서울도서관 서북권 분관 추진 현황

- 현황 및 향후 추진 일정

1. 의원님께서 요구하신 자료를 아래와 같이 제출 합니다.

※ 주관부서 : 문화본부 문화시설과 / 지원부서(설계 및 공사) : 도시기반시설본부 건축부

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 서대문구 북가좌동 479(3,486㎡, 시유지)

ㅇ 규    모 : 지하1층/지상5층, 연면적 9,109.10㎡

ㅇ 주요시설 : 어린이·일반 열람실, 멀티미디어 자료실 등

ㅇ 사업기간 : 2019년 ~ 2027년

ㅇ 사 업 비 : 60,297백만원(토지비 12,355백만원 포함)

□ 추진경과

ㅇ ’19. 7.	서북권 도서관 분관 기본계획

ㅇ ’19. 9.	市 투자심사(2단계 조건부 추진)

ㅇ ’20. 3.~4.	공유재산심의 및 공유재산관리계획 의결

ㅇ ’21. 8.	기부금(300억) 약정식 (MBK 파트너스 김병주 회장)

ㅇ ’21. 10.	서울시립도서관(서대문) 조성 추진계획 수립

ㅇ ’21. 12.~ ’22. 9.	국제설계공모 추진(도시공간기획담당관)

ㅇ ’21. 12.~ ’22. 10.	서울시립도서관(서대문) 운영방안 용역

ㅇ ’22. 5.	서울시립도서관(서대문) 조성 변경계획 수립

ㅇ ’22.11.	기본 및 실시설계 착수

ㅇ ’23. 9.	행안부 LIMAC 타당성 조사

□ 향후계획

ㅇ ’24. 2.      설계용역 준공

ㅇ ’24. 5.      공사 착공(예정).  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	문화본부 문화시설과	문화시설3팀장	최우진
	도시기반시설본부 건축관리과	건축관리과장	조승제
	문화본부 문화시설과	주무관	김한종
	도시기반시설본부 건축관리과	주무관	이해경
	작 성 일 : 2023.12.28