문서번호	도로계획과-8363
결재일자	2023. 12. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	민자사업팀장	도로계획과장	안전총괄관		재난안전관리실장
김정식	강전남	전기현	김혁		12/29
					최진석
협 조

서부간선지하도로 민간투자사업 변경 실시협약 체결 계획

2023. 12.

재난안전관리실

(도로계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

서부간선지하도로 민간투자사업
변경 실시협약 체결 계획

서부간선지하도로 민간투자사업의 총사업비 및 운영비 변경과
출자자 변경에 따른 변경 실시협약을 체결하고자 함

*************

***********************************************************

*************************************************

************************************************************

********************************************************

****************************************************

Ⅱ		사업개요

□ 사업개요

ㅇ 사업규모: 왕복 4차로, 연장 10.33km (소형차전용도로)

ㅇ 공사기간: ’15.3.1.~’21.8.31. / 운영기간: ’21.9.1.~’51.9.14.

ㅇ 사업방식: BTO

ㅇ 총사업비: 519,961백만원(’07.7. 불변가)

ㅇ 통 행 료: 2,700원(’23.7.1. 인상)

ㅇ 사업시행자: 서서울도시고속도로(주) - 농협은행, 현대건설 등 8개사

□ 추진경위

ㅇ ’07.12.20.	민간제안서 제출

ㅇ ’10.06.14.	우선협상대상자 선정

ㅇ ’13.09.23.	변경제안서 제출

ㅇ ’15.03.11.	실시협약 체결 및 사업시행자 지정

ㅇ ’15.12.03.	실시계획 승인

ㅇ ’16.03.01.	공사 착공 (~’21.8.31. 준공)

ㅇ ’16.12.21.	환기방식 변경 (행정2부시장 방침 제243호)

******************************************

ㅇ ’17.12.22.	운영시간 변경 승인

***************************************************************************************

ㅇ ’20.04.28.	환기민원 등으로 공사기간 연장 (60 → 66개월)

ㅇ ’21.04.09.	전일 운영에 따른 교통량 및 운영비 검토 보고

***********************************

************************************************

ㅇ ’21.04.12.	운영비 변경 승인 통보(도로계획과-5084, ’21.04.02.)

ㅇ ’21.09.01.	개통

ㅇ ’21.11.15.	총사업비 변경 승인 검토 보고

*****************************************

ㅇ ’21.11.16.	총사업비 변경 승인 통보(도로계획과-5084, ’21.11.16.)

ㅇ ’22.04.19.	간이적격성조사 완료

*********************************

ㅇ ’23.12.22.	계약심사 완료(법률지원담당관 )

Ⅲ		실시협약 변경내용

□ 주요 변경내용

******		************	**********	**
*********		*******	*******	******
	*****	*******	*******	******
	*****	*******	*******	***
********		*******	*******	******
********		*****	*****	*
********		******	******	***
********		**	**	*
********		*****	*****	***

□ 총사업비 변경(실시협약 제12조, 별표 2)

ㅇ 실시계획 승인 시 변경 공사비 및 환기방식 변경 등에 따른 공사비 등 기 승인(도로계획과-14686, ’21.11.15.)된 공사비를 총사업비에 반영

□ 운영비 변경(실시협약 제40조, 별표 8)

ㅇ 24시간 운영 및 최저임금 인상을 반영하여 기 승인(도로계획과-5008,
’21.4.9.)된 운영비만 반영

※ **********************************************************************************************

□ 협약교통량 변경(별표 6)

ㅇ 전일 운영에 따른 증가 교통량 반영

□ 기준통행료 변경(별표 7)

ㅇ 변경된 총사업비 및 운영비, 공사기간 중 투입된 민간사업비 집행
실적 등을 반영하여 인하된 기준통행료 반영

□ 출자자 및 출자지분 변경(별표 1)

ㅇ 공사가 준공되어 운영중인 단계로 건설출자자의 출자지분을 재무출자자에게 양도

□ 실시협약 내용

ㅇ *********************************************

ㅇ ********************************************************************

ㅇ *********************************************************

ㅇ **********************************************************************

Ⅳ		추진계획

ㅇ ’24.02.	시의회 보고

ㅇ ’24.03.	변경 실시협약 체결

붙임  1. 총사업비 및 운영비 변경내역. 1부.
2. 실시협약 신구조문 대비표. 1부.
3. 변경 실시협약(안) 1부.
4. 변경 실시협약(안) 재무모델 1식.