아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	(주) 혜원까지 종합건축사사무소 귀중()
(경유)
제목	건설사업관리용역 만료 예정에 따른 업무 협의 「시립서대문 농아인복지관 별관 건립공사」

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 우리 본부에서 공사중인 「시립서대문 농아인복지관 별관 건립공사」와 관련 귀 사에 서 건설사업관리용역을 실시하고 있으나, ***************************************************************

○ 건설사업관리용역기간 : 2021. 2.15 ~ 2023. 2. 11

○ 업무 협의내용

- 현재 지하2층 벽체형틀 공사를 작업중으로 공기연장이 불가피함

- *******************************************************************

- 이에 대한 귀사의 의견 제시 요청. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	고병연		복지시설과장	박용구		건축부장	01/27
이형재
협조자
시행	건축부-1444	(	2023. 1. 27.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 13층 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2652	/전송	02-3708-2659	/	gobong8@seoul.go.kr	/	부분공개(5)