문서번호	문화정책과-6022
결재일자	2023. 4. 24.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

				시 민
주무관	문화공간운영팀장	문화정책과장
이재익	빈재석	04/24
		전재명
협 조

「돈의문 박물관마을 소공원 조성 공사」

감리자 실정보고 검토

2023. 4.

문화본부

(문화정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「돈의문 박물관마을 소공원 조성 공사」

감리자 실정보고 검토

「돈의문박물관마을 소공원 조성 공사」중 "경계담장 축조공사"에 대한 감리자 실정보고를 검토하여 보고 드림

1		사업개요

ㅇ 공 사 명 : 돈의문 박물관마을 소공원 조성 공사

ㅇ 공사내용

- 조  경 : 공원 727.6㎡ + 잔디마당 646.8㎡ 조성(면적 1,374.4㎡)

- 건  축 : 철골주차장 철거(연면적 1,361.83㎡)

- 문화재 : 경계 한식 담장 축조 (L=60m, H=2m)

ㅇ 공 사 비 : 금843,892,000원

ㅇ 공사기간 : 2023. 2.15. ~ 2023. 8.18.

ㅇ 계약방식 : 공동도급(분담이행방식)

ㅇ 시 공 자 : ㈜다우조경*********** + (주)원택건설***********

- 분담 내용 :〔조경공사〕                 〔건축+문화재 수리〕

2		설계현황 및 실정보고 내용

□ L~K구간 장대석 추가 설치

ㅇ 위    치 : 돈의문역사관 마당 화단과 잔디마당 경계

ㅇ 설계현황 : 경계부분 목재 난간으로 계획

- 목재 난간은 하부 콘크리트 기초(0.3m×0.3m×0.18m)로 지지

***************************

**********************************

********

********************************

***************************************

******************************

□ I~K구간 담장높이 조정

ㅇ 위    치 : 잔디마당과 경희궁 경계부분

ㅇ 설계현황 : I~K구간 경희궁 측 담장 높이 1.6m~2m 설계

********

**********************************************

***********************************************************************************

**************************************

3		실정보고 검토 결과

□ 감리자 검토 의견

*******************

************************

*********************************************************

*****************

***********************************************************************

ㅇ 공사비 증감 및 검토의견

- 공사비 증감 현황

**	*****		******
	****	****
*******	***********	***********	**
*******	**********	**********	**********
*******	************	************	**********
*******	**********	**********	**
*******	**********	**********	********
**	************	************	***********
*******	***********	***********	**********
*****	***********	***********	**********
**	************	************	***********

- 내역 및 수량산출, 단가적용이 적합하게 작성됨을 확인

※ 기존 계약단가 적용

□ 실정보고 처리 의견

*************************************************

************************************************************

따로붙임 : 감리자 실정보고서, 관련 현황 및 도면.  끝.