문서번호	문화정책과-12748
결재일자	2023. 9. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	문화공간운영팀장	문화정책과장
이재익	김은경	09/06
		전재명
협 조

「돈의문 박물관마을 소공원 조성 공사」

전기 및 통신 공사 발주계획 검토 보고

2023. 9.

문화본부

(문화정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「돈의문 박물관마을 소공원 조성 공사」

전기 및 통신 공사 발주계획 검토 보고

「돈의문박물관마을 소공원 조성 공사」중 전기공사(전등 설치계획) 및 통신공사 발주계획을 검토·보고 드림

1		전기공사 발주계획

□ 설계개요

ㅇ 공 사 명 : 돈의문 박물관마을 소공원 전기공사

ㅇ 설계내용

- 소 공 원 : 공원등 3개소 설치

- 잔디마당 : 공원등 3개소 설치

- 기타 부대공사 : 전기선 배선 및 배관 설치, 기초대 설치 등

ㅇ 설계내역 : ************

**	***	*****	*****
**********	**********	**********	*******

□ 설계변경 내용

ㅇ 검토사유 :「돈의문 박물관마을 소공원 조성 공사」설계변경에 따른 전기공사 설계변경 검토

ㅇ 전기공사 설계변경 내용

- 잔디마당의 기존 설계 공원등(3개, 높이 4m) → 잔디등(1m) 변경

- 대나무 차폐조경에 따른 수목투사등 추가 설치

- 계단 및 스텐드 설치에 따른 계단등 추가 설치

- 공연 등을 위한 분전함 추가 설치

- 잔디등, 수목투사등, 계단등 설치에 따른 배선 및 배관, 기초대 설치 등

ㅇ 변경 설계내역 : ************

**	**	***	*****	*****
**	**********	**********	**********	*******
**	**********	**********	**********	*******
**	**********	**********	**********	*

〈 등기구 구매계획 – 관급자재 별도 구매 〉

****	***	***	*****	***	**
*****	*	**	**	**	**
*****	*********	*******	*******	*******
******	*********	*********	*********	*********	**********

※ ***************************************************************

※ 관급자재 구매 수수료 0.54%포함

□ 전기 공사 발주계획

ㅇ 공 사 명 : 돈의문 박물관마을 소공원 전기공사

ㅇ 공 사 비 :********************

ㅇ 계약방법 : 수의계약(여성기업)

ㅇ 공사업체 : ***********

ㅇ 공사기간 : 착공일로부터 25일

□ 관급자재 발주계획

ㅇ 관급종류 : 공원등, 잔디등, 수목투사등, 계단등

ㅇ 관급자재 : ********************************

ㅇ 발주계획 : 조달청 나라장터를 통해 구매 설치

2		통신공사 발주계획

□ 설계개요

ㅇ 공 사 명 : 돈의문 박물관마을 소공원(A, B) CCTV 구매설치

ㅇ 설계내용

- A구간 : 소공원 CCTV 2개소 카메라 및 부품 구매 설치

- B구간 : 잔디마당 CCTV 2개소 카메라 및 부품 구매 설치

ㅇ 설계내역 : ************

**	**	*****	*****	**
***	**********	**********	*******	******
***	**********	**********	*******	******
**	**********	**********	*******

□ 설계변경 내용

ㅇ 검토사유

- 종로구청 관재 접속 변경 요청**********************

- 설계내역 업체******** “나라장터 종합쇼핑물”에서 제품 삭제

ㅇ 통신공사 주요 설계변경 내용

- 구매업체 변경 ******************  ※ 2개사 모두 중소기업

- 신규 추가 : 계단 카메라 1대, (종로구 관재)경보 및 엠프시설

- 누락물량 추가 : 케이블 배관용 전선관, CCTV폴 기초대

- 전력공급용 케이블 변경 : UTP(인터넷통신)케이블 → 난연전력케이블

- 종로구 자가망 연결에 따른 전선관 및 광케이블, 추가부품, 정보통신공사 증가

※ 기존 설계는 KT 임대망 접속이며, 임대료 발생 사유로 자가망 접속 요구

ㅇ 변경 설계내역 :*************

**	**	*****	*****	**
**	**********	**********	*******
**	**********	**********	*******
**	**********	**********	******	*

□ 통신 공사 발주계획

ㅇ 공 사 명 : 돈의문 박물관마을 소공원(A, B) CCTV 구매설치

ㅇ 공 사 비 : **************************

ㅇ 발주계획 : 조달청 나라장터를 통해 구매 설치

ㅇ 납품기간 : 계약일로부터 25일

3		처리계획

ㅇ 전기공사 재무과 계약의뢰

ㅇ 전기공사 및 통신공사 관급자재 나라장터 납품의뢰. 끝.