“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	설계변경(2회, 정산)시행 및 변경계약의뢰- 건설폐기물처리용역

1. ㈜유신 감리 제18-1341호(2018.12.12.)와 관련입니다.

2. 우리시에서 시행중인 『교량시설물 일상유지보수공사(강북)외 1건 건설폐기물처리용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2회, 정산)을 시행코자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 교량시설물 일상유지보수공사(강북) 외 1건 건설폐기물처리용역-강북

나. 용역기간 : 2017. 06. 01. ~ 2018. 12. 20

다. 도 급 자 : ㈜대아이디아이 대표 김상회

라. 설계변경내용

- 용역비 변경

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고(증,감)
총용역비	42,322,000	20,195,000	감 22,127,000
공 급 가	38,474,546	18,359,091	감 20,115,454
부 가 세	3,847,454	1,835,909	감 2,011,545

마. 설계변경 사유

- 2017 모래내고가 보수공사에 대한 폐기물 실정산

바. 예산과목

- 교량관리, 고가차도 및 입체교차로 관리, 모래내고가 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

붙 임  1. 설계변경(2회, 정산) 검토 보고서 1부.

2. 감리단 설계변경(2회) 검토 보고서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	교량안전과장
주무관	배상현		강북일반교량팀장	代김태형		교량안전과장	12/18 김종호
협조자	계약1팀장	조현
시행	교량안전과-22234	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울특별시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1970	/전송	02-2133-1429	/	yamato78@seoul.go.kr	/	부분공개(5)