문서번호	교량안전과-22338
결재일자	2018.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
배상현		손창익	12/19 김종호
협조

『2017 모래내고가 보수공사』

설계변경 자문회의 결과 및 시행계획

2018. 12.

교량안전과

(강북일반교량팀)

-  2017 모래내고가 보수공사 -

설계변경 자문회의 결과 및 시행계획

『2017년 모래내고가 보수공사』감리단 실정보고에 따른 설계변경    자문회의 결과 및 시행계획 보고임.

□ 관련근거

○ 설계변경 자문회의 운영계획(교량안전과-15181, ‘18.8.29)

○ 감리단 실정보고-공간비계 추가보강 등(1종교량 제18-404호, ‘18.12.10)

○ 실정보고에 따른 조치계획 보고(교량안전과-22196호, ‘18.12.18)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2017 모래내고가 보수공사

○ 공사기간 : 2017. 08. 24 ~ 2018. 12. 20

○ 공사규모 : RC박스 섬유보강 4,705㎡, 차량방호시설개량 230m 등

○ 공 사 비 : 1,721,258천원(도급비 1,513,000천원, 관급비 208,258천원)

○ 시 공 사 : ㈜태강산업개발 대표 윤강문

○ 감 리 사 : ㈜유신 외 1개사

□ 설계변경 자문회의 결과

○ 설계변경 자문회의 개요

- 일 시 : 2018.12.17.(월) 16:00

- 장 소 : 교량안전과 회의실

- 위원구성

· 위원장 : **********************

· 위  원

: 내부(3) : **********************

: 외부(1) : ************************

· 간  사 : ***********

○ 설계변경 자문회의 결과 : 조건부 가결

○ 주요 자문내용 및 조치계획

- PC방호벽 설치 및 철거 손료 적용시 품셈에 나온 흄관 3개월 미만(80%)으로 적용 할 것 ⇒ 3개월 미만(80%) 적용 반영

- 철도안전관리자 및 전기안전관리자 인건비 적용시 타 공사 현장과 비교하여 합리적으로 적용 할 것 ⇒ 확인결과 동일단가 기적용

- 제경비 검증 결과 이윤 과다 산출분에 대해 감조정 할 것

⇒ (당초 요율 : 14.20 % → 변경 : 12.86 %) 감조정 완료

- 공사기간 연장에 따른 간접비(실비) 청구금액에 대하여 검토후 적정 금액으로 시공사와 협의 처리 할 것

⇒ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준에 의거 산출금액(68백만원)과 시공사 요청금액(76백만원)을 비교 검토한 결과 제반여건을 감안하여 협의금액(68백만원)을 반영하는 것으로 합의

○ 자문결과 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분	실정보고 내역	자문결과 반영	증, 감	비 고
총공사비	1,606,159,000	1,592,756,350	감 13,402,650
도급비	1,518,350,000	1,505,370,000	감 12,980,000
관급비	87,809,000	87,386,350	감 422,650

□ 조치계획

○ 자문회의 결과 통보(시공사, 감리사)하여 설계변경 시행

○ 설계변경 자문회의 계약금액 조정 관리대장 등재

붙임   1. 설계변경 자문회의 결과서 1부.

2. 설계변경 제비율 검증 확인서 1부.

3. 설계변경 자문회의 결과반영 내역서 1부.

4. 간접비(실비) 청구에 대한 합의각서 1부.  끝.