문서번호	교량안전과-22677
결재일자	2018.12.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
배상현		손창익	12/24 김종호
협조
	주무관		김태형

교량시설물 일상유지보수공사(강북) 외 1건 건설폐기물처리용역 설계변경(1회) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12

교량안전과

(강북일반교량팀)

교량시설물 일상유지보수공사(강북) 외 1건

건설폐기물처리용역 설계변경(1회) 보고

건설사업관리단에서 제출한『교량시설물 일상유지보수공사(강북) 외 1건 건설

폐기물 처리용역』 설계변경(1회)건에 대하여 검토 보고드림

Ⅰ		관 련 근 거

□ 설계변경(제1회) 검토보고((주)유신 감리 18-1462호, 2018.12.21.)

- 강북 일상유지보수공사

Ⅱ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 2018년 교량시설물 일상유지보수공사(강북)외 1개소 건설폐기물처리용역

□ 용역내용

- 건설폐기물 수집 운반 (폐콘크리트 240톤, 폐아스콘 850톤)

- 건설폐기물 중간처리(폐콘크리트 240톤, 폐아스콘 660톤, 혼합폐기물 190톤)

□ 용역기간 : 2018.05.23. ~ 2018.12.31

□ 용 역 사 : ㈜대아이디아이 대표 김상회

□ 용 역 비 : 26,343,650원

Ⅲ		설계변경(1회) 내용

□ 용역 기간 연장

- 사유 : 용역의 과업에 포함된 워커힐고가 보수공사의 준공기한이 ‘19.03.31.까지 이므로 이에 맞추기 위해 용역 기간을 연장코자 함

- 당초 : 2018.05.23.~2018.12.31

- 변경 : 2018.05.23.~2019.03.31

□ 강북일상유지보수공사에 대한 폐기물 정산

- 폐기물 운반 및 처리 물량 증,감 내역

공 종		규 격	단위	당 초	변 경	증, 감	비 고
1. 폐기물 운반				840	38.2	- 801.8
강북 일상 유지 보수 공사	폐기물운반(덩어리)	주 간	톤	20	-	- 20	물량 정산
		야 간		20	-	- 20
	폐아스콘(평삭재)	주 간	톤	20		- 20
		야 간		20		- 20
	폐아스콘(혼합폐기물)	주 간	톤	-	13.10	13.10
		야 간		760	25.10	- 734.9
워커힐 고가 보수 공사	폐기물운반(덩어리)	주 간	톤	100	100	-	공사 추진중
		야 간		100	100	-
	폐아스콘(평삭재)	주 간	톤	20	20	-
		야 간		30	30	-
	폐아스콘(혼합폐기물)	주 간	톤	-	-	-
		야 간		-	-	-
2. 폐기물처리				1,090	288.2	801.80
강북 일상 유지 보수 공사	폐콘크리트(덩어리)		톤	40	-	- 40	물량 정산
	폐아스콘(덩어리)		톤	40	-	- 40
	폐아스콘(평삭)		톤	570	31.53	- 538.47
	혼합폐기물(아스콘혼폐)		톤	190	6.67	- 183.33
워커힐 고가 보수 공사	폐콘크리트(덩어리)		톤	200	200	-	공사 추진중
	폐아스콘(덩어리)		톤	50	50	-
	폐아스콘(평삭)		톤	-	-	-
	혼합폐기물(아스콘혼폐)		톤	-	-	-

□ 폐기물 용역비 증,감 내역

공 종	당 초	변 경	증, 감		비고
폐기물운반	11,497,073	3,136,709	감	8,360,364
폐기물처리	12,451,700	3,895,837	감	8,555,863
공급가액	23,948,773	7,032,546	감	16,916,227
부가세	2,394,877	703,254	감	1,691,623
도급액	26,343,650	7,735,800	감	18,607,850

○ 예산과목별 배분

- 워커힐고가 보수공사 : (당초 6,990,000원 → 변경 6,990,000원)

- 2018 일상유지보수공사(강북) : (당초 19,353,650원 → 변경 745,800원)

----------------------------------------------------------------------------------

총 용역비 : (당초: 26,343,650원 → 변경 7,735,800원)  감 18,607,850원

Ⅳ		조 치 계 획

○ 건설사업관리단으로부터 제출된 설계변경 검토 내용이 적정한 것으로 판단되으로 설계변경 조치코자 함.

붙임 1. 감리단 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경(1차) 내역서 1부.  끝.