문서번호	하천관리과-6114
결재일자	2021. 4. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	하천생태팀장	하천관리과장		물순환안전국장
윤희성	노승원	손경철		04/27 최진석
협 조

도림천 단면확장 기본 및 실시설계

용역기간 연장 검토보고

2021.4

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 1호~8호	■	□

도림천 단면확장 기본 및 실시설계 용역기간 연장 검토보고

도림천 단면확장 기본 및 실시설계 시행 중 단기대책 시행에 따른

용역기간 연장 검토 내용을 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 도림천 단면확장 기본 및 실시설계

○ 용 역 사 : ㈜한국종합기술, ㈜동일기술공사, ㈜선진엔지니어링종합건축사무소

○ 용 역 비 : 1,142백만원

○ 용역기간 : ‘18.7.16 ~ ’21.4.30

○ 용역내용

- 동방1교 ~ 승리교(1.6km) 단면확장

· 하천기본계획의 단면확장 계획 검토를 위한 지하매설물 조사

· 신림공영차고지 저류조 등 관련계획을 반영한 수리수문 검토

· 단면확장 최적방안(반복개화 및 암거신설) 검토 및 설계시행

□ 추진경위

○ ‘18.7.12 : 기본 및 실시설계 시행

○ ‘19.4. ~’20.10 : 중간보고(3회) 및 전문가자문 시행

****************************************************************************************************************

*********************************************

****************************************

*************************

***************************************

*********************************

*********************************************

□ 용역기간 연장 사유

○ 단기대책(변경안) 시행에 따른 설계기간 반영

○ 교량 재설치(신본교, 신화교)에 따른 경관심의 기간 등 반영

□ 변경 내용

○ 계약기간(2차)

- 당 초 : 2019.1.1 ~ 2021.04.30

- 변 경 : 2019.1.1 ~ 2021.11.30

○ 계약금액(2차) : 642,300천원(변경없음)

- 단기대책 설계 후 설계비 정산

※ 1차(‘18.7.16~’18.12.31, 500백만원) 준공 후 2차 시행 중

□ 향후계획

○ ‘21.05 : 단기대책(낙차공 철거 및 교량 재설치 등) 주민설명회 시행

○ ‘21.08~09 : 공법심의 및 경관심의

○ ‘21.11 : 용역준공.  끝.