문서번호	도시철도계획부-9780
결재일자	2021. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계획과장	도시철도계획부장
이경훈		김동철	12/08 정대현
협 조
	건축계획과장			이병희
	주무관			박강수

- 우이신설 연장선 도시철도 기본계획 수립 용역 -

과업내용 변경에 따른 설계변경 검토 보고

2021. 12.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

- 우이신설 연장선 도시철도 기본계획 수립 용역 -

과업내용 변경에 따른 설계변경 검토 보고

「우이신설 연장선 기본계획 수립용역」에 대한 지반조사 물량 증·감 및 추가 과업 등으로 인한 사업비 조정사항이 있어 검토 보고 드림.

□ 용 역 개 요

○ 용 역 명 : 우이신설연장선 도시철도 기본계획 수립용역

○ 용역기간 : '21.3.28. ~ '22.3.28

○ 용 역 사 : ㈜유신 외 6개사  /  ○ 용 역 비 : 712,812천원

	[ 사 업 개 요 ]
- 사업내용 : 솔밭공원역 ~ 방학역 도시철도 건설 - 규 모 : 연장 3.5km, 정거장 3개소 - 사업기간 : '21. ~ '29. - 총사업비 : 2,830억원(2차 철도망 기준)

□ 추 진 경 위

○ '20.11.17.: 제2차 서울시 도시철도망 구축계획 확정 고시

○ '21. 1. 7. : 우이신설 연장선 업무이관(교통실→도기본)

○ '21. 3.26. : 기본계획수립 용역 계약 및 착수('21.3.29~'22.3.28)

○ '21. 4.21. : 기본계획수립 용역 착수 보고회 개최

○ '21.11.18.: 기본계획수립 용역 자문회의

- 노선계획의 타당성 및 사업비 절감방안 마련

○ '21.12.(현재) : 선형 및 구조물 계획, 총사업비 검토 중

□ 현 안 사 항

○ '11년 예비타당성 조사에서 제외된 시점부를 포함하여 기본계획을 수립하는 등 과업범위 및 내용 추가로 인한 용역 설계변경 필요

(단위 : 천원)

구 분		직접비	제경비	계	비 고
	1) 사업연장 증가	24,404	26,949	51,353
	2) AHP 평가 및 분석	4,238	4,681	8,919
	3) 입찰안내서 작성주)	7,385	7,029	14,414
	4) 건축분야 개념설계	10,335	11,413	21,748
	5) 지반조사 물량정산	-2,396	105	-2,291
	6) 노선측량	12,749	11,942	24,691
	7) 기 타(손해배상공제료, VAT)			12,979
계		56,715	62,119	131,813

주) 3) 입찰안내서 작성 : 공사수행방식 심의결과 기타공사로 결정시 정산조치(미반영)

□ 검 토 내 용

1) 사업연장 증가에 따른 투입인원수 조정

- 사업규모 변경 [연장 3.5km → 3.94km,  증) 0.44km]

공 종		단위	사업규모		비 고
			당초	변동
노선연장		km	3.5	3.94
	토공연장	km	0.33	0.55	********
	터널연장	km	3.17	3.39	**************
정 거 장		개소	3	3
터널개소		개소	4	5	************

- 공공교통시설 타당성평가대행 비용 산정기준(국토부, ‘15.11)에 따른 투입인원 조정

공 종		단위	투입인원		증ㆍ감	용 역 비 (천 원)	비 고
			당초	변동
타당성 평가 및 기본계획
	기술사	인	89	97	8	2,938
	특급기술자	인	158	173	15	4,471
	고급기술자	인	238	262	24	5,906
	중급기술자	인	305	333	28	6,240
	초급기술자	인	348	376	28	4,848
	소 계		1,138	1,241	103	24,403
제경비, 기술료						26,950
합 계						51,353

2) AHP(계층화 분석법) 평가 및 검토 과업 추가

-*************************************************본사업의 변화된 현장여건주)을 반영한 기본계획(안)에 대해 타당성 여부 확인을 위한 AHP 분석 필요

주) 변화된 현장여건 : 시점부 연장추가, 정거장 위치 및 규모 조정, 교통수요변화 등

【 도시철도망 구축계획 및 노선별 도시철도 기본계획 수립 지침 】

도시철도망 구축계획 대상노선은 경제성 분석결과 B/C가 0.7이상이거나 AHP값이 0.5이상을 만족해야 한다

공 종		단위	투입인원		증ㆍ감	용 역 비 (천 원)	비 고
			당초	변동
AHP 평가 및 분석
	기술사	인	-	1.2	1.2	446
	특급기술자	인	-	3.4	3.4	994
	고급기술자	인	-	4.5	4.5	1,089
	중급기술자	인	-	4.7	4.7	1,036
	초급기술자	인	-	3.9	3.9	673
	소 계		0	17.7	17.7	4,238
제경비, 기술료						4,681
합 계						8,919

*********************************************

**********************************************************

3) 입찰안내서 작성비용 반영

- 공사수행방식 검토시 설계시공일괄입찰 방식(T·K)으로 결정될 경우 입찰안내서 작성 과업 추가 필요

공 종		단위	투입인원		증ㆍ감	용 역 비 (천 원)	비 고
			당초	변동
입찰안내서 작성
	기술사	인	-	1.7	1.7	632
	특급기술자	인	-	4.1	4.1	1,198
	고급기술자	인	-	8.6	8.6	2,082
	중급기술자	인	-	6.9	6.9	1,521
	초급기술자	인	-	5.4	5.4	932
	소 계		0	26.7	26.7	6,365
	인쇄비	식		1식	1식	1,020
제경비, 기술료						7,029
합 계						14,414

********************************************

***************************************************

4) 정거장 유형화 분석 및 개념설계 추가 과업(건축분야)

- 도시철도 정거장 디자인 향상 추진방안('21.5.20. 부시장방침 제94호)에 따른 개념설계 과업 추가

공 종		단위	투입인원		증ㆍ감	용 역 비 (천 원)	비 고
			당초	변동
건축분야 개념 설계비
	건 축 사	인	-	5	5	1,860
	특급기술자	인	-	29	29	8,475
	소 계		0	34	34	10,335
제경비, 기술료						11,413
합 계						21,748

5) 지반조사 수량변동에 따른 변경

- 지반유형별 시추조사 깊이 변동 및 시험수량 물량정산

- 당초 : 시추심도 22m/공 → 변경 : 계획고 하 0.5D 또는 2m 적용

구 분	TB-1	TB-2	TB-3	TB-4	TB-5	TB-6	TB-7	계
조사대상(m) (계획고～0.5D)	37.5~44.5	25.7~32.7	23.4~30.4	24.4~31.4	24.8~31.8	24.7~31.7	23.9~30.9
시추깊이 (m)	41.9	30.5	27.2	28.3	27.5	33	30	218.4

【 지반조사편람 (서울시, 2006.9.) 】

공 종		단위	투입인원		증ㆍ감	용 역 비 (천 원)	비 고
			당초	변동
시추조사비
	점토	m	2.0	1.7	-0.3	-12
	모래	m	37.0	46.8	9.8	502
	자갈	m	11.0	-	-11	-2,972
	풍화암	m	59.0	56.2	-2.8	-208
	연암	m	30.0	43.0	13	1,128
	보통암	m	15.0	51.7	36.7	3,383
	경암	m	-	19.0	19	2,235
	소 계		154	218.4	64.4	4,056
현장시험
	표준관입시험	회	140	85	-55	-3,427
실내시험
	토질시험	회	12	11	-1	-428
	암석시험	회	15	13~14	-1~2	-2,954
부대공
	시료상자	개	21	26	5	358
계						-2,395
제경비, 기술료						105
합 계						-2,290

6) 노선측량비 반영

- 현재 진행 중인 기본계획 수립 용역비에 지반조사비용은 포함되어 있으나 노선측량비용은 미포함되어 있음.

- 정밀한 타당성 평가를 위해서는 노선의 중심선․종단․횡단측량을 통해 현재의 현장여건을 반영한 노선 및 종․평면구조물 계획 수립 필요

⇒ 노선측량비용 반영 및 추가 과업을 위한 용역설계변경 필요

【 도시철도망 구축계획 및 노선별 도시철도 기본계획 수립 지침 】

Ⅲ. 노선별 도시철도 기본계획의 수립절차

3.1.1. 노선별 도시철도 기본계획의 수립 및 서전협의

가) 시·도지사는 도시철도망 구축계획이 확정되고 예비타당성조사 결과 건설의 타당성이 인정되는 노선의 건설이 필요한 경우 노선측량, 지반조사 등을 포함하여 전문기술용역업체에 의한 보다 정밀한 타당성평가를 수행한다.

공 종		단위	투입인원			용 역 비 (천 원)	비 고
			중심선	종단	횡단
노선측량비
외업	고급기술자	인	5	-	-	1,210
	중급기술자	인	5	2	2	1,985
	초급기술자	인	5	2	2	1,553
	초급기능사	인	10	4	4	2,921
	보통인부	인	10	2	2	1,936
내업	고급기술자	인	2.5	-	-	605
	중급기술자	인	2.5	-	-	551
	초급기술자	인		2	2	690
	초급기능사	인		4	4	1,298
계			40	16	16	12,749
제경비, 기술료						11,942
합 계						24,691

********************************************

**********************************************

7) 기타 경비 : 12,979천원

- 용역비 변경에 따른 손해배상공제료 및 VAT : 12,979천원

□ 검 토 의 견

○ 기본계획수립용역 정산 및 추가과업 등으로 인한 설계변경을 시행하고자 함.

○ 추가용역비는 본 사업의 낙찰차액 활용

【관련규정】

가) 지방자치단체 세출예산 집행기준(행안부 예규 제99호, 2020.1.1.)

제Ⅱ장 세출예산 운영을 위한 일반지침

1. 예산집행의 효율성 제고

1-7. 낙찰차액의 효율적 활용을 통한 적극적 추경 편성 및 이·불용액 최소

나) 시설비 및 시설부대비 낙찰차액 사용관련 안내 (예산담당관-4883, 2020.4.23.)

행안부 답변 : 기존 사업의 사업계획 변경에 따른 물량확대 경우에도 기존 계약의 낙찰차액 사용가능

다) 낙찰차액

(단위: 천원)

용 역 명		예 산	계약금액	낙찰차액	비 고
	기본계획수립 용역	840,000	712,812	127,188
	전략환경영향평가	153,000	134,934	18,066
	재해영향성 검토용역	37,000	32,254	4,746
계		1,030,000	880,000	150,000

□ 행 정 사 항

○ 용역 설계변경 시행 및 변경 계약을 통한 용역 추진

○ 설계변경 내용

(단위 : 원)

구 분	당초	변경	증·감
용 역 비	712,812,000	844,625,000	증131,813,000
용역기간	'21.3.29. ~ '22.3.28	'21.3.29. ~ '22.3.28	변경없음

- 예산과목 : 신교통수단 도입, 경전철 건설사업, 우이신설연장선 도시철도 건설, 시설비

붙임 : 1) 관련공문(㈜유신) 1부.

2) 변경설계서 1부.  끝.