문서번호	한강관광사업과-530
결재일자	2022. 2. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	한강관광사업과장	총무부장		한강사업본부장
박강수	권혁제	송영민		02/15 윤종장
협 조	총무과장		代오승민
	기획예산과장		김영창

한강 역사·문화·홍보 전시관 설치 세부시행 계획

2022. 2.

총   무   부

(한강관광사업과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

한강 역사·문화·홍보 전시관 설치 세부시행 계획

서울을 대표하는 한강의 과거, 현재, 미래에 대한 시대적 변화와 역사적   가치를 효과적으로 홍보하기 위한 전시관 설치 시행계획을 보고 드림

Ⅰ		사업개요

사업내용

○ 사 업 명 : 한강 역사·문화·홍보 전시관 설계 및 전시물 제작·설치

○ 사업기간 : `22. 2. ~ `23.12.

○ 사업위치 : 뚝섬 자벌레(통로 및 서울생각마루 1층)

○ *********************

- *********************************

- ***************************************************

○ 주요내용 : 전시관 조성을 위한 공간기획 및 전시물 제작·설치

- 한강의 역사·문화 모형물 전시를 위한 공간기획 및 컨텐츠 개발

- 체험 및 동적 전시물 등 첨단 복합 전시매체 기획 및 제작·설치

추진현황

○ `19.12.~`20.10. : 한강역사생태홍보전시관 설립타당성 조사 학술용역

- 한강의 과거·현재·미래에 대한 역사적 조명, 체험하는 전문화된 홍보전시관 타당성 검토

○ `21. 7.29. : 한강사업본부 주요 현안 보고(시장 보고)

○ `21. 9.10. : 한강역사홍보·전시관 설립 추진계획 수립 보고(부시장 보고)

○ `22. 1.20. : 신년업무 보고시 전시관 조성계획 포함

추진방향

○ 디지털 미디어를 활용한 한강의 변화를 관람객에게 시각적으로 전달

- 전시장 입구에 미디어월 또는 터널천장 LED로 한강의 스토리 설명

○ 공간별 전시주제를 구분한 한강 변천사와 디지털아카이브를 활용한 스토리텔링

- 한강의 발원지와 유역면적, 하천특성, 한강개발 현황 등의 변천사 설명

○ 디지털 미디어를 활용한 실감콘텐츠 제작으로 시대별 가상체험 실현

- 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등의 콘텐츠를 활용한 관람객 체험존 제공

○ 한강과 관련된 문화재(지정문화재, 무형문화자원)와 유물 모형 등을 발굴 제작·설치

- 한강의 옛 이야기를 담은 모형(황포돛배, 썰매, 땟목, 생활도구 등) 제작 및 배치

○ 뚝섬유원지역사와 자벌레를 연계한 문화예술 공간계획 개선

- 광진구청, 서울교통공사와 협업하여 지하철역사 시설 개선 및 이용객 보행동선을 고려한 유휴공간 활용 및 지역연계 문화프로그램 운영 지원

Ⅱ		세부 추진계획

전시관 구성계획

○ 사업대상

구 분	전시·홍보·체험관	커뮤니티+프로그램 공간	합 계
****	****** *********	****** **********	******

○ 1관 기본방향 : 한강의 과거, 현재, 미래를 소개

- 프롤로그 → 과거의 한강 → 한강과 함께한 서울시민의 삶 → 오늘의 한강(11개 한강공원 정보 포함)　→　앞으로의 한강 순으로 전시계획

○ 2관 기본방향 : 한강에 대한 이야기를 직접 체험하는 공간조성

- 디지털아카이브 구축(한강의 유구한 역사 검색) → 스토리텔링(한강의 설화 및 인물, 사건·사고 등을 소개) → 실감콘텐츠(가상현실, 증강현실 등)를 활용한 체험 →  옛 생활도구(썰매, 물지게 등) 체험

○ 커뮤니티 + 프로그램 공간 : 전시주제와 부합한 프로그램 공간으로 활용

- 전시 주제에 부합하는 체험학습을 위한 커뮤니티 및 휴식공간으로 구성

사업추진 절차

’22. 2.~`22. 4.		’22. 4.~`22.12		’23. 1.~’23.11.		’23.12.
공고 및 업체선정 (제안서 평가 및 협상)	⇨	기본계획 및 실시설계	⇨	공간기획 및 전시물 제작·설치	⇨	전시장 조성완료

전시 설계 및 제작·설치용역 추진

○ 용역내용 : 전시장 배치 및 전시물(콘텐츠,모형 등) 제작∙설치

○ 계약방법 : ① 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약) + ② 장기계속 계약

※ 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조에 따라 협상에 의한 계약

○ 용역기간 : 계약일로부터 ~ 2023.12.

○ *****************************************

*******************************************************

○ 자격조건(공동/분담이행방식 허용)

-「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 의한 직접생산확인증명서 소지업체

-「산업디자인진흥법 시행규칙」제9조에 따른 산업디자인 전문회사(종합디자인분야 또는 환경디자인분야 또는 제품디자인분야)로 입찰등록한 자

-「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」제57조에 의한 비디오물제작업 또는 「소프트웨어산업 진흥법」 제24조에 의한 소프트웨어사업자로 입찰참가 등록한 자

-「건설산업기본법」제9조에 의한 실내건축공사업으로 입찰참가 등록한 자

-「정보통신공사업법」제14조에 따른 정보통신공사업으로 입찰참가 등록한 자

○ 업체선정 절차

사전규격 공개(5일)	⇨	입찰 공고 (40일)	⇨	질의 답변	⇨	입찰등록 및 제안서접수	⇨	제안서 평 가	⇨	협상대상자 선정 및 통보	⇨	협상 및 계약체결

- 제안서 평가항목 및 배점기준

∙ 종합평가점수(100점)=기술능력평가점수(90점)+입찰가격평가점수(10점)

‣기술능력평가점수(90점) = 정성적 평가(70, 평가위원회) + 정량적 평가(20, 발주처)

Ⅲ		향후계획

○ `22. 2월         : 일상감사 의뢰 및 사전규격 공개(나라장터)

○ `22. 3.~`22. 4. : 용역발주 및 공고

○ `22. 4월          : 협상 및 계약 체결

○ `22. 5.~`22.12. : 기본 및 실시설계(콘텐츠 계획 등)

○ `23. 1.~`23.11. : 모형물 및 콘텐츠 제작·설치

○ `23.12월         : 전시관 조성 완료.

붙임  1. 한강 역사·문화·홍보 전시관 제안요청서(과업내용서 포함) 1부.

2. 한강 역사·문화·홍보 전시관 설계내역서 1부.  끝.