문서번호	광화문광장추진단-3247
결재일자	2021. 4. 14.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		광장재생팀장	광화문광장사업반장
최미선		변종진	04/14 임창수
협조

「광화문광장 문화시설(가변) 등 기본 및 실시설계」

용역계약 변경(기간연장) 검토보고

2021. 04.

도시재생실

광화문광장추진단

「광화문광장 문화시설(가변) 등 기본 및 실시설계」

용역계약 변경(기간연장) 검토보고

1		용역개요

○ 용 역 명 : 광화문광장 문화시설(가변) 등 기본 및 실시설계

○ 용역기간 : ’20.12.21.~’21.4.19

*****************************

**********************

○ 주요내용 : 광화문광장에 조성되는 문화시설에 대한 기본 및 실시설계

- 광장에서 다양한 문화 활동(전시), 편의를 제공하기 위한 가변시설물 설계

2		추진경위

○ ’20.12.17.   기본 및 실시설계 용역계약 및 과업착수

○ ’21. 1.14.   과업 착수보고

○ ’21. 2.26.   광화문광장시민위원회(상임위) 1차 보고

○ ’21. 3.17.   광화문광장시민위원회(상임위) 2차 보고

○ ’21. 3.29.   광화문광장시민위원회(도시공간분과) 보고

3		계약 변경사항

○ 변경내용 : 기간 연장(3개월)

구분	변경 전	변경 후	비고
계약기간	’20.12.21.~’21.4.19	’20.12.21.~’21.7.19	계약금액 변동없음

○ 귀책사유 : 서울특별시(지체상금 부과여부 : 미부과)

○ 연장사유 : 광화문시민위원회 의견 반영하여 설계 진행하는 사항으로  위원회 의견 반영에 따른 절대 과업기간 부족으로 기간연장 필요

4		향후계획

○ 용역 준공기한 연장에 따른 계약 변경의뢰 (추진단→재무과)

붙임 : 1. 합의각서 1부.  끝.