코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	용역 일시정지 알림(중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본설계 용역 외 1건)

우리 부서에서 시행 중인 「중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본설계 용역」 및 「중랑물재생센터   시설현대화(2단계) 기본설계 건설사업관리(설계감리) 용역」의 계약상대자에게 아래와 같이 과업수행을  일시정지 통지하였음을 알려드립니다.

가. 계약 내역

용 역 명	계약금액(원)	계약업체	계약일자	용역기간	비 고 (잔여일수)
중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본설계 용역	4,857,200,000	㈜이산 외 4개사	’20. 2. 20.	’20. 2. 20.∼ ’21. 12. 31.	38일
중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본설계 건설사업 관리(설계감리) 용역	194,256,000	㈜동진이엔시	’21. 5. 18.	’21. 5. 21.∼ ’21. 12. 31.	38일

*****************************

*******************************************************************

***************************  끝.

	물재생시설과장
주무관	양해선		물재생기획팀장	조장환		물재생시설과장	11/24 윤창진
협조자
시행	물재생시설과-12188	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)	/
전화	02)2133-3826	/전송	02)2133-1043	/		/	부분공개(5)