의원 요구 자료 제출

시 행	수상공간조성과-36
결재일자	2024. 1. 2.
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자 참조
수신자	서 울 특 별 시 장(기획담당관), 기획예산과장

주무관		수상공간조성과장	한강전략사업부장	한강사업추진단장	미래한강본부장	결재
박지정		권혁제	이상이	김용학	01/02
					주용태
협 조
	한강여가사업부장				이예림

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 4152번, 권영세 의원, 국토교통위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

권영세 의원(국토교통위원회, 국민의힘)

1. 한강 아트피어 관련 설명자료

가. 한강 아트피어 관련 설명자료

나. (가)와 관련된 추진사항 및 향후 추진 계획(관련 예산 포함)

□ 위원님이 요구하신 자료를 아래와 같이 제출합니다.

가. 한강 아트피어 관련 설명자료

○ 사업개요

- 사 업 명 : 한강 아트피어 조성

- 필 요 성 : 노후된 거북선나루터를 대체건조하여 사계절 이용가능한 친수공간 조성

- 위    치 : 용산구 이촌동 302-20 일대 (이촌한강공원 내)

- 기    간 : ’23.6. ~ ’26.12.

- 사 업 비 : *********(공사비, 용역비 등)

- 주요내용 : ① 연면적 5,000㎡ 규모의 교육·문화·휴게시설 조성
② 계류시설(50선석), 산책로 및 야외조형물 전시공간 마련
③ 부유식 수영장(900㎡) 및 온수풀 조성·운영

※ 한강 아트피어 조성 사업 방침(수상시설과-1150 / '23.3.15.) 별도 붙임

나. 한강 아트피어 추진사항 및 향후 추진계획(관련 예산 포함)

○ 추진사항

- ’23.3.15.  : 한강 아트피어(이촌) 조성 추진 방침 수립

- ’23.6.29.  : 한강 아트피어 조성 기본계획 및 타당성조사 용역 계약 및 착수

•******************************

•**********************************************************

- ’23.9.19.  : 공유재산 심의(적정)

- ’23.10.16. : 시 투자심사 심의(조건부 적정)

- ’23.11.21. : 공유재산관리계획 심의(원안의결)

- ’23.12.18. : ’24년 예산반영****

•********************************************

○ 향후계획

- ’24. 6.     : 기본계획 및 타당성조사 완료

- ’24. 8. ~   : 기본 및 실시설계

- ’25. ~ ’26. : 조성공사 및 운영방안 수립

○ 연도별 계획(예산 포함)

연도	’23년		’24년		’25년			’26년
	상	하	상	하	상		하	상	하
추진 내용	계획수립	기본계획 및 타당성조사		기본 및 실시설계		조성 공사				준공
예산 (억원)	-	*		**		***				*

따로붙임 : 한강 아트피어(이촌) 조성 추진 계획(방침서) 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	미래한강본부 (수상공간조성과)	담당사무관	권 혁 제
	☎ 3780-0863	주무관	박 지 정
	작 성 일 : 2024. 1. 2.