문서번호	치수안전과-86
결재일자	2024. 1. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	치수총괄팀장	치수안전과장
조중환	류춘광	01/03
		김지환

2024년도 자연재해저감 시행계획

2023. 12.

물순환안전국

(치수안전과)

2024년도 자연재해저감 시행계획

자연재해의 예방 및 저감을 위해 수립한 자연재해저감 종합계획의 2024년도 시행계획을 수립코자 함.

□ 관련근거

ㅇ 자연재해대책법 제16조의 2(자연재해저감 시행계획 수립 등)

ㅇ 자연재해대책법 시행령 제14조의3(자연재해저감 시행계획의 작성 등)

□ 기본방향

ㅇ 자연재해로부터 시민의 생명보호와 재산피해 최소화

ㅇ 자연재해 위험지구 저감사업 추진으로 위험요인 해소

ㅇ 하천기본계획, 하수도정비기본계획 등을 반영하여 실행 가능토록 추진

□ 자연재해저감 종합계획 개요(2016년 승인)

ㅇ 자연재해 위험지구 지정 : 총 240개 지구

ㅇ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2026. 12.

ㅇ 총사업비 : 20,515억원 (구조적대책 17,436억, 비구조적대책 3,079억)

ㅇ 연차별 추진계획

(단위 : 억원)

구 분		합 계	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025		2026
개 소		240개	8개			52개			115개			65개
금 액		20,515	2,331	2,331	2,331	2,838	2,831	2,832	1,257	1,256		1,255	1,253
	구 조	17,436	2,022	2,022	2,022	2,529	2,522	2,522	951	950		949	947
	비구조	3,079	309	309	309	309	309	310	306	306		306	306

□ 추진실적

ㅇ 추진현황 : 240개소 중 125개소 추진(완료 99, 추진 중 26)

ㅇ 추진금액 : 8,102억원

ㅇ 추진 세부내용

- 구조적 대책 : 5,816억원

· 수계단위(2개)   : 2개 지구    121억원(추진 중 2)

· 내수재해(51개)  : 22개 지구 4,076억원(완료 14, 추진 중 8)

· 하천재해(74개)  : 22개 지구 1,599억원(완료  9, 추진 중 13)

· 사면재해(107개) : 77개 지구    15억원(완료 74, 추진 중 3)

· 토사재해(6개)   : 2개 지구      5억원(완료 2)

- 비구조적 대책 : 2,286억원

· 풍수해보험, 하천 예경보시설, 하수관거 유지관리, 빗물펌프장 유지관리

□ 2024년 시행계획

ㅇ 사업대상 :【 구  조 】위험지구 단위 8개(하천 4, 내수 4)

수계단위 2개(하천 2)

【 비구조 】서울 전역

ㅇ 사업예산 : 106,569백만원 (구조 72,984, 비구조 33,585)

ㅇ 예상 문제점 및 해소대책

- (도림천4 지구) 도로단절(교량철거)에 따른 공사반대 민원 발생

→ 보행가교 설치 추가반영 및 교통소통대책 변경심의 완료

- (강남역 지구) 현재 추진 중인 강남역 대심도 빗물배수터널과 연계 필요

→ 대심도 빗물배수터널 기본설계 내용에 따라 하수관로 계획 등 재검토

ㅇ 세부 사업내용

【 구조적 대책 】

연번	위험지구명 (재해유형)	사 업 명	사업내용	사업기간	`24년 예산 (백만원)
합 계					72,984
1	도림천4 (하천)	도림천(관악구) 단면확장	통수단면 확장 (교량재가설 등)	`18.1~`25. 6	1,820
2	오류천1 (하천)	오류천(구로구) 단면확장	복개확장 및 제방 축제	`20.3~`29. 4	2,300
3	오류천3 (하천)
4	대방천1 (하천)	대방천(영등포구) 단면 협착구간 확장	복개박스(1련) 신설	`24.1~`26.12	400
5	서초동 (내수)	서운로 일대 저지· 고지수로 정비	유역경계 조정	`19.9~`24.12	13,750
6	홍대입구역일대 (내수)	망원배수구역 펌프장 설치	사천펌프장 신설 유입관로 공사	`18.1~`26. 6	3,815
7	금호4가동 (내수)	금호 빗물펌프장 시설용량 증대	금호펌프장 증설	`23.8~`26.12	399
8	흑석동 (내수)	흑석 빗물펌프장 이전 및 용량증대	흑석펌프장 이전 및 증설	`23.12~`29.12	500
9	도림(하천재해 수계단위)	도림천 일대 빗물배수시설 설치	빗물저류배수시설 4.5km	`23 ~ `28	50,000
10	대방(하천재해 수계단위)

【 비 구조적 대책 】

연번	사 업 명		`24년 예산 (백만원)	비고
합 계			33,585
1	하수관로 유지관리비		20,000
2	풍수해보험		1,224
3	빗물펌프장 유지관리비		11,991
		정밀안전진단(수문, 펌프장 등)	817
		노후 수문(권양기, 레크바 등)	1,102
		노후배수설비(펌프,제진기,밸브 등) 개량 및 시설보강	7,575
		수배전반, 변압기, 제어설비 등	2,497
4	하천예경보시설 신설 및 유지관리비		370

붙임 : 1. 2024년 자연재해저감 시행계획 및 2023년 추진실적 세부내역 1부.

2. 자연재해저감 추진 실적 세부내역 1부.  끝.